코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 변경의뢰(한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매)

1. 한양도성도감-9805(2020.9.25.)호와 관련입니다.

2. 「한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매」와 관련하여 아래와 같이 납품기한 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매

나. 납품기한 : 2020. 9. 26.

다. 변경사유 : 공사 완공 일정에 맞추어 최종 납품되어야할 보안장비 납기 연장

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)
구 분	당 초	변경내역	변 경
납기일	************	*************	*****

마. 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 통합 관제망 구축 및 운영-문화재 재난방지시설 구축,

시설비및부대비, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서(휴네시온 공문) 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	최광호		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	09/25 안중호
협조자
시행	한양도성도감-9809	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)