문서번호	교통정보과-14317
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보과장
안재성		박양규	09/28 이수진
협 조
	주무관			전형우

“2020년 서울시 무인단속시스템 성능개선” 착수보고 회의 결과보고

2020.09

교통정보과

「2020년 서울시 무인단속시스템 성능개선 사업」

착수보고 회의 결과보고

2020년 서울시 무인단속시스템 성능개선 사업의 효율적인 추진을

위한 착수 보고 회의를 개최하고 결과를 보고 함

1		회의 개요

□ 일    시 :‘20. 9. 22(화) 14:00 ~ 15:00

□ 장    소 : 교통정보과 회의실 (종로소방서 5층)

□ 참 석 자 : 6명 (교통정보과 과장 외 2명, 업체 PM 등 2명)

□ 보 고 자 : 1명(시행사 PM 1명)

□ 주요내용 : 성능개선 사업범위

2		사업개요 및 주요회의내용

□ 사업 개요

구 분	내 용
사 업 규 모	불법주정차(22개소) 및 버스전용차로(20개소) 성능개선
사 업 기 간	‘2020.9.16.~12.31
사 업 비	650,874,270원(VAT포함)
시 행 사 명	유에프엠시스템즈(주)

□ 주요 회의내용

○ 사업기간이 촉박한 만큼 계획공정이 지연되지 않도록 사업추진

○ 차량통행에 문제발생 없도록 작업을 진행하며, 필요시 야간작업도 검토

○ 특히 안전시설물 설치 및 보행자 안전에 만전을 기해주기 바람

○ 제어기 함체는 안전사고가 발생하지 않도록 2.7m이상 설치 필요

○ 불법주정차 및 버스전용차로 장애제어관리기 설치 검토 보고 요청

○ 각 지점별 통신방식 관련 기존 유선방식은 유지하는 방안 검토 보고 요청

○ 사전 협의 및 신청 사항(통신, 공인인증 등)을 파악하여 보고 요청

3		향후 추진

□ 10.08 : 현장점검 및 검토 보고서 작성

□ 10.16 : 기자재 승인 및 제작

□ 10.30 : 자재반입 검수, 성능개선 공사 시작

□ 12.19 : 성능개선 공사 완료, 센터시스템 모듈 설치 및 자체시험

□ 11. 2 ~ 12.31 : 자체시험 및 공인기관 성능 평가 완료 후 준공

붙 임 : 착수보고 자료 1부.  끝.