실정보고 검토서

공 사 명

반포천 유역 분리터널 건설공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 서초구 법원로 10

~ 사평대로 240일원

· 규    모 : 유역분리터널

(▣4.5×4.5~D7.1m,  연장 1,162m)

· 공사기간 : '18.2.1.~'22.3.31.

· 도 급 비 : 38,482백만원

· 시공사 : (주)호반산업외 1개사

· 건설사업관리 :

㈜도화엔지니어링외 2개사

· 설계사 : ㈜제일엔지니어링외

2개사

실정보고 건명

TBM터널 지보패턴 변경 및 붕락부 보강(3차) 실정보고

- 반포사관 제2020-353호((2020.9.14.)

실정보고

사    유

TBM터널 굴진중 암반선이 설계와 상이하고 붕락부가 발생하여, 기 승인된 ‘TBM 지보패턴 변경 및 붕락부 보강(2차) 실정보고’와 같이 암판정 결과 반영(지보패턴 P-1~3 → P-4~5) 및 붕락부 보강하여 추진

건설사업관리자

검  토  의  견

암반선이 설계와 상이하여 암판정 결과 반영 및 붕락부 보강을 실시하여 공사를 추진함이 타당

공  기  에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고(증·감)
규모	********* 숏크리트공 503㎥ 락볼트 설치 745EA 콘크리트 타설 2,160㎥	********* 숏크리트공 827㎥ 락볼트 설치 1,721EA 콘크리트 타설 1,855㎥ 붕락부 보강 1식	*** (증)138EA 숏크리트공 (증)324㎥ 락볼트 설치 (증)976EA 콘크리트 타설 (감)305㎥ 붕락부 보강 (증)1식
금액	*********	*********	(**********

예산조치

계    획

당초 도급비 범위내 시행가능( ), 당초 사업비 범위내 시행가능(○) 별도(추가) 예산 확보 필요( )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발 주 처

검토의견

건설사업관리기술자의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 실정보고

사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

비     고

결재

담당

김재건

과장

손창익

부장

09/28

박홍봉