등록번호	교육아동청소년과-17062		주무관		돌봄지원팀장	교육아동청소년과장		생활복지친화국장		부구청장
등록일자	2020.9.25.
			이나리		代김효진	정미선		김종석		전결 09/28 代송인상
결재일자	2020.9.28.
공개구분	대시민공개
			협조	주무관			김미경
				예산팀장			양기영
				기획조정과장			이동성
서울청구초 돌봄교실 조성공사 낙찰차액 사용계획
생활복지친화국 교육아동청소년과

서울청구초 돌봄교실 조성공사 낙찰차액 사용계획

서울청구초 돌봄교실 조성공사와 관련하여 바닥 및 천장 마감 등 추가공사 필요에 따라 낙찰차액을 사용하고자 함

Ⅰ	사 업 개 요

□ 공 사 명 : 서울청구초 돌봄교실 조성공사

□ 공사기간 : 2020. 8. 3. ~ 10. 1.

□ 공사범위 : 서울청구초 동산관 1층 교실 4개, 복도(345㎡)

Ⅱ	계약현황 및 사용계획

□ 계약현황

(단위 : 천원)

발주금액(A)	계약금액(B)	낙찰차액(A-B)	사용금액
187,638	166,659	20,979	12,300

□ 사용계획

- 교실 바닥 필름보호판 시공 추가, 천장 마감 공사 추가 등

- 공사비용 증가에 따라 낙찰차액을 사용하여 계약금액 조정(증 12,300천원)

□ 예산과목 : 교육아동청소년과, 빈틈없는돌봄 아동행복실현, 아동복지

증진, 중구 모든아이 돌봄사업, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ	행 정 사 항

□ 낙찰차액 사용에 따른 설계변경 요청(건축과).  끝.