투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	영동대로 지하공간 복합개발 관련 환경영향평가(소규모)용역 준공기한 변경 의뢰(3차)

1. 영동대로복합개발추진단-7228호(‘19. 9.19)호와 관련입니다.

2. 「영동대로 지하공간 복합개발」환경영향평가(소규모) 용역에 대해 아래와 같이 준공기한 변경을 외뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 :「영동대로 지하공간 복합개발」관련 강남권 광역복합환승센터 환경영향평가(소규모) 용역

- 용역기간 : 2018. 3.26 ~ 2019. 12.25

- 용역금액 : 173,860,000원

- 용역업체 : ㈜대한콘설탄트

나. 준공기한 연기 내용

- 준공기한 변경 내역(계약금액 변경 없음 )

****	*****	*****************************
	*****	******************************

- 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

************************************************************************

라. 예산과목 : 지역발전본부, 도시재생 및 공공개발, 국제교류복합 공간 육성,

영동대로 지하공간 복합개발, 시설비(210-401-01)

붙임  1. 용역 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 방침서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	영동대로복합개발추진단장
주무관	윤영상		복합개발토목과장	이재혁		영동대로복합개발추진단장	09/23 이승석
협조자	주무관	양경신
시행	영동대로복합개발추진단-7255	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 청계청사 3층	/
전화	02-3708-2442	/전송	02-3708-2414	/	dbsdudtkd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)