문서번호	기획운영과-6618
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김홍석		윤학수	09/17 이원영
협조

식물연구소 전기설비 증설 공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

서울식물원

(기획운영과)

식물연구소 전기설비 증설 공사 계획

판매온실이 식물연구소로 기능 변경되어 실험실 및 조직배양실 등이 입주됨에 따라 이에 필요한 전기용량(30kW)의 전기설비를 증설 공사코자 함.

□ 관련근거

○ 식물연구시설 시스템 제작 및 설치 계획 (식물연구과-4166호 2018.8.9)

○ 서울식물원 조성공사 관련 실무회의 결과에 대한 의견 회신(SH서울식물원사업부-2685호 2018.7.26.)

- 배관공사가 완료된 상태로 전기 증설 불가 회신

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 식물연구소 전기설비 증설공사

○ 공사내용 : 전기설비 30kW 증설

- 전기실로부터 식물연구소까지 전력케이블(25㎟/1C×4) 신설

- 식물연구소 분전반 1대 설치 (4P 100AT, ELB 22EA)

○ 공사기간 : 계약일로부터 20일

□ 조치방안

○ 설계금액 : ********

- 예산과목 : 식물원 운영 및 식물문화 조성, 공공운영비(201-02)

***************

*****************************************************************

******************************************************

*****************************************

**************************

*********************************

□ 향후계획

○ 2018.  9. 20    전기공사 계약

○ 2018. 10. 01    전기공사 착공

○ 2018. 10. 10    전기공사 준공

붙임 :  1. 분전반 부하용량계산서 1부

2. 전압강하계산서 1부. 끝.