상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울식물원
수신	내부결재
(경유)
제목	변경 계약 시행(식물문화센터 전시조명 보완공사)

1. 기획운영과-5690호(2018.8.17.)와 관련입니다.

2. 우리식물원에서 진행중인 『식물문화센터 전시조명 보완공사』가 설계변경됨에 따라 재계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 식물문화센터 전시조명 보완공사

나. 계약업체 : **************

다. 계약기간 : 2018.9.10. ~ 2018.10.29

라. 계약금액

○ 당  초 : ********************************

○ 변경후 : ****************************

○ 감  액 : **********************

마. 설계변경사유 : 조명트랙 천정 노출시공에 따른 물량감소 및 제경비 정산

바. 예산과목 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영, 식물원 운영관리 및 이용활성화,식물원 운영 및 식물문화 조성, 공공운영비

붙임 1. 정산 보고서 1부

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	김홍석		기획운영과장	10/16 윤학수
협조자	주무관	장나미
시행	기획운영과-7525	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 강서구 마곡중앙로 165, 1105호 (마곡동, 안강프라이빗타워)	/
전화	2104-9729	/전송	2104-9709	/	khs25@seoul.go.kr	/	부분공개(5)