투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청

1. 도시철도계획부-7677(2019.8.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인 「9호선 4단계 도시철도 기본계획 수립 용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 9호선 4단계 도시철도 기본계획 수립 용역

2) 계약업체 : ㈜신성엔지니어링 외 6개사

3) 계약기간 : 2018. 9. 6. ~ 2019. 9. 5.

4) 계약금액 : 금663,580천원

나. 준공기한 연기요청 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2018.09.06.~2019.09.05.	2018.09.06.~2019.12.31.

※ 계약금액 변동 없음

붙 임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	박현우		계획과장	김동철		도시철도계획부장	08/30 代김동철
협조자
시행	도시철도계획부-7727	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 10층	/
전화	02)772-7131	/전송	02)772-7304	/	hwpark5672@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)