문서번호	도시철도토목부-7727
결재일자	2020.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이형일		최진규	07/28 최병훈
협 조
	주무관			한재호

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

휴(무)일 작업계획 승인 관련 검토 보고(‘20.8월 1주차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

휴(무)일 작업계획 승인 관련 검토 보고(‘20.8월 1주차)

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」 관련 ‘20.8월 1주차

휴(무)일 기간 중 작업계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림.

1		휴(무)일 작업승인 요청내용

○ 근  거 : 하남 제20-645호(‘20. 7.28.)

한신하남 제713-349호(‘20. 7.28.)

○ 작업일 : 총 1일【  ‘20. 8. 1.(토)】

2		휴(무)일 작업계획

○ 휴(무)일 작업 주요내용 및 근무계획

작업일	작업 시간	작업 구간	휴(무)일 작업내용			관리자(근무자)
			주요작업내용	인원	장비	시공사		관리단
‘20. 8.1. (토)	주간	본선구간 H1 정거장	정거장 외부출입구#1 – 환기구#1 슬라브 철근조립 정거장 외부출입구#2 – 작업 예정사항 없음 정거장 외부출입구#3 – 2span양생, 1span 및 정화조#2 동바리해체 정거장 외부출입구#4 – 환기구#4 벽체 철근조립 고덕천교 - 작업 예정사항 없음 환기구#1 현장정리 환기구#2 현장정리	직 영: 6명 목 수:24명 철 근:19명 가시설: 9명 연수생:12명	카고:3대 살수차:1대 굴삭기:1대	공사 공무 건축	성승우 정금환 정민구	홍춘선

3		건설사업관리단 검토의견

○ 휴(무)일작업 귀책 검토(야간작업은 추가지급 제외)

작업일시	귀책 사유	의견			관리단 검토의견
		시공사	관리단	발주청
‘20. 8. 1.(토) 07:30~16:30	시공사	◯	◯		[관련규정] - 공사계약 일반조건 (5절 6항 휴일작업과 야간작업) - 공사계약 특수조건 (제15조 휴일작업과 야간작업) - 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리 대가 지급 관련규정에 의거 “휴일작업은 계약 상대자가 부담“ 시공사 부담이 타당한 것으로 판단됨.
	관리단
	발주청

○ 검토의견 및 추후 행정사항

-  공사의 원활한 공정추진을 위하여 휴일작업은 본선시점 현장정리,  외부출입구 #1 환기구 #1 슬래브 철근 조립, 외부출입구 #2 작업 없음, 외부출입구 #3 2span 양생, 1span 및 정화조 #2 동바리 해체, 외부출입구 #4 환기구 #4 벽체 철근 조립, 고덕천교 작업 없음,  환기구 #1 현장정리, 환기구 #2 현장정리, 야간작업 없음.

-  공사계약 일반조건 5절 6항(휴일작업과 야간작업), 공사계약 특수조건 제15조 (휴일작업과 야간작업), 건설사업관리 과업내용서 6.3 (휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급)에 의거, “휴일작업으로 인하여 발생되는 추가비용은 계약상대자가 부담한다”는 규정에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단되며,

-  “야간작업으로 인하여 발생되는 추가비용”은 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리 대가 지급 관련규정에 의거 “야간작업은 추가 지급 제외”(야간작업시 기 계약된 건설사업관리기술자 범위 내에서 인원 및 기간 조정 근무)함.

-  휴일작업에 따라 발생되는 비용(건설사업관리 비용)에 대하여는 계약체결이 원만히 이루어져 원활한 공정이 추진될 수 있도록 조치되어야 함.

4		휴(무)일 작업계획 검토결과

○ 관련 근거

- 공사계약 일반조건 5절 6항(휴일작업과 야간작업)

- 공사계약 특수조건 제15조(휴일작업과 야간작업)

- 공사시방서 4.1.9(산업보건상의 조치) 마.(근로시간 연장의 제한)

- 건설사업관리용역 과업내용서 6.3(휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

○ 휴(무)일작업 사유

-  2020년 8월 1주차 휴(무)일작업 및 야간작업 승인 요청의 건

(한신하남 제713-349, ‘20.7.28.)

□ 시공사의 요청에 대한 휴일 및 야간작업(토목)으로 발생되는 추가 감리용역비는 관련규정 입찰안내서[계약조건(하남선 1-1공구) 공사계약 특수조건] 제15조(휴일작업 및 야간작업)에 따라 당사(한신공영(주))에서 부담코자 함.

○ 휴(무)일근무 비용부담

-  휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ‘13.11.14.)

□ 휴(무)일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급

⇒ 시공사 귀책으로, 시공사에서 건설사업관리 대가 지급 부담

5		조치의견

○ 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 휴(무)일 주간작업계획(‘20. 8. 1.(토)) 승인요청에 대하여 아래와 같이 승인하고자 함.

가) 휴(무)일 및 야간작업 사항은 공사계약 일반조건 제5절 6항, 공사계약 특수조건 제15조 및 건설사업관리 과업내용서 6.3에 의거 시공사 귀책으로, 시공사에서 건설사업관리 대가 지급 부담 처리

※ 안전사고 재발 방지를 위한 건설사업기술사(감리원) 출퇴근 7·4제 시행 철저

나) 휴(무)일 및 야간작업 시 시공사 현장책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자 포함 근무토록 하여 안전사고예방 관리 철저

- 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 이행

※ 중대재해시 초기대응 체계 구축(토목부-4232, ‘20.2.28.)에 따라 대응 철저

- 코로나19 감염 예방대책 및 폭염대비 근로자 보호를 위한 사전 준비 및 시행에 철저[붙임 지침(매뉴얼) 참고]

■ 코로나19 감염 예방대책

▸ 예방행동수칙 안내 및 숙지

▸ 노동자 투입 전 매일 기침 등 호흡기 증상 유무와 체온 확인 실시

▸ 마스크 착용, 손소독제, 체온계 등 비치 및 사용 철저

▸ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 발생할 경우 시 보건소, 선별진료소 등에

문의하여 검진을 받을 수 있도록 조치

■ 폭염대비 근로자 보호대책 철저

▸ 폭염특보 발령 대비 신속한 보고체계 유지

▸ 폭염특보 기준 변경에 따른 사전 준비 및 시행 철저

(온도계 및 습도계 공사현장 비치 등)

▸ 폭염특보 발령기준 변경에 따른 공사관계자(건설사업관리기술자, 현장소장 등)

대응요령 숙지

다) 『건설공사장 안전사고 예방 중점 관리 20대 항목』준수 철저

라) 시공계획서·상세도 작성 등 관계 규정 및 안전관리 5RP 제도, 근로자 관리 등 이행 철저

마) 화재예방관리 철저

- 위험물(가스, 화약 등)에 대해 안전관리자 사전 확인 후 작업 실시

- 전기 접지 확인 및 전열기 과부하 사용 근절, 근로자 숙소 및 휴게실 관리, 지정 장소 외 흡연 금지 철저

바) 용접 작업 시 안전장구 착용 및 불티 방지막 설치, 안전요원(화재감시자) 배치 후 작업 시행 철저

사) 공사장 안전 및 품질관리 철저

- 기상특보 발표시 당일 공사중지를 검토하고, 공사장 예찰활동 강화 등 사전예방 철저

- 추락방지를 위한 개구부 관리 및 점검통로·작업발판 등 규정 준수 설치 철저

- 동바리 설치·해체 및 가시설 해체시 안전요원을 필히 배치후 작업실시

아) 출·퇴근 시간대 차로 점용 공사 시행 금지 철저(6~9시, 17~21시)

※ 출·퇴근 시간대 작업 시 사전 승인 후 작업 시행

자) 지하매설물 매달기 상태 수시 점검 철저

차) 공사로 인한 시민 생활 불편이 최소화 되도록 현장관리 철저

카) 지하수 관리 및 되메우기 시공관리 철저

타) 폐기물 지정장소로 처리 및 관리 철저

파) 미세먼지 비상저감조치 발령시 상황별 대응 및 실외 작업자 보호 등 현장관리 철저

※ 대기환경보전법에 따라 `20.1월부터 저공해 미조치 건설기계(5종)는 관급공사장에 사용할 수 없음.

하) 건설기계 작업시는 건설기계 안전점검체크리스트 등에 의거 안전점검 철저

거) 차도 일시 점용 시 신호수 배치 및 작업시간 최소화, 가설재 청결 상시 유지, 자재 정리정돈, 경광등·윙카·야간 안전유도 표지판(야간 시인성) 설치, 보행자 통로 확보 등 관리 철저

너) 기타 기(旣) 지시사항 준수 철저

붙임  1. 검토의견서 및 관련 공문 각 1부.

2. 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 1부.

3. 폭염대비 건설공사장 노동자 보호를 위한 대응 매뉴얼 1부.  끝.