투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	동물병원 외 2개소 수전설비 교체 및 정비공사 착공일 변경 요청

우리과에서 시행중인 “동물병원 외 2개소 수전설비 교체 및 정비공사”와 관련하여   공사추진 일정상 착공일 변경을 요청합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 서울대공원 동물병원 외 2개소 수전설비 교체 및 정비공사

나. 공사기간 : 착공후 28일

다. 공사내용 : 동물병원, 주보일러실, 동일삭도 배전반 교체 등

라. 계 약 자 : *************

2. 요청사항

가. 요청내용 : 착공일자를 2020.9.21(월)에서 2020.9.28(월)로 변경

나. 변경사유 : 관급자재 납품 및 감리기간 등 공사추진 일정상 조정 필요

붙임  합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	전성완		주무관	代전성완		시설과장	10/05 代김지만
협조자
시행	시설과-7397	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7431	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(5)