문서번호	기전과-8303
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		10/05 서승완
협조

『KB국민은행 통합사옥 신축 1차』

교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

강서도로사업소

(기전과)

『KB국민은행 통합사옥 신축 1차』

교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른      준공승인검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-10948(2020.06.05.)호

KB통합-외-2020-100(2020.09. .)호

대영전기감 GE20C-09-20(2020.09.24.)호

동원.감 제2020-96(2020.09. .)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : KB국민은행 통합사옥 신축공사 중 교통시설물 설치공사(1차)

원 인 자 : 삼성물산(주)

위     치 : 영등포구 여의도동 45번지 일대

공사개요 : 교통신호기 신·이설 및 교통안전표지 개선

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜동림티엔에스	대영유비텍㈜	㈜창희이엔에스	제어기 신설 1, 철거 1대 지주 신설 6, 철거 8본 신호등 신설 13, 철거 11조 음향신호기 신설5, 이설3, 철거3대
표지		㈜동림티엔에스		-안전표지 신설 7, 철거 2매

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2020.08.07. ~ 2020.08.31.

준공검사 : 2020.09.08.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2020년 09월 08일 14시

구 분		기관(사업자)명	성 명
검 사 자	신 호	대영유비텍㈜	*****
	표 지	㈜동림티엔에스	*****
입 회 자		대영유비텍㈜	*****
″		교통관리과
″		영등포경찰서 교통과
″		교통운영과
시 공 사	신 호	㈜창희이엔에스	*****
	표 지		*****
확 인 자		강서도로사업소 기전과	이 성 도

구 분		지적사항	수량	조치여부
신 호	제어기	전원선 절연 부적정	1	절연보강
	보 도	복구 미비	3	재복구
		턱낮춤 부적정(미완료)	1	완 료
	지 주	가로등 표찰 미부착(통합지주)	2	설 치
	맨 홀	배수 부적정	1	재설치
		단차 부적정	2	보도정비
표 지	지 주	기초 부적정	1	제설치

검사결과

Ⅳ		조 치 의 견

상기 검사결과 설치기준에 적합하게 시공되었음으로 준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공감리조서 및 준공확인서 2부.

3. 준공검사 지적사항 조치 사진대지 1부.

4. 준공내역서 및 준공도면 2부.  끝.