★

문서번호	도로과-18389
결재일자	2020.10.6.
공개여부	부분공개(5)

담 당	보도관리담당	도로과장		건설교통국장
남창림	이기영	유충현		10/06 서형석
협 조
	예산담당		유미조

2020년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

추경 및 낙찰차액 집행계획 보고

2020. 10.

건설교통국

도  로  과

2020년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

추경 및 낙찰차액 집행계획 보고

관내 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위하여 추진중인 「2020년도 포장도로 유지보수공사」의 본예산 조기 소진으로 추경예산 및 낙찰차액 등 집행잔액을 활용하여 주민불편 민원을 신속히 해소하고자 함.

□ 관련근거

○ 2020년 제3회 추가경정예산 확정 현황 알림

[기획예산과-10274, 2020. 9. 17.]

○ 신속집행 관련 시설비 및 부대비 낙찰차액 활용 안내

[기획예산과-3807, 2020. 4. 6.]

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2020. 3. 30. ~ 2020. 12. 31.

○ 사업위치 : 성북구 관내

○ 사업내용 : 보도블록 정비 45a, 측구 및 경계석 정비 1,000m

○ 도 급 비 : 628,775,900원

○ 도 급 자 : ㈜수인엔지니어링 대표 이호성

○ 예 산 액 : 1,944백만원(본예산 1,100백만원, 추경예산 844백만원)

○ 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 포장도로 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 횡단보도(턱낮춤) 개선 정비 공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 예산 집행계획

○ 현재 시행중인 「2020년 포장도로 유지보수공사(연간단가)」에 추경예산(844백만원)을 포함하여 정비

- 관내 노후 및 파손된 도로를 신속히 정비하여 안전사고를 사전에 예방하고 민원요구(구 및 시의회) 등 불편사항을 해소하기 위하여 상반기에 본예산(1,100백만원) 조기 소진

- 금년 3차 추경에 추가 예산을 확보하였으나 별도사업 발주 시 공개입찰, 계약, 착공준비 등으로 상당기간이 소요되고 서울시 「보도공사 Closing 11」으로 사업 추진기간(통제기간)이 촉박하여 「2020년 포장도로 유지보수공사(연간단가)」에 추경예산을 포함하여 추진

○ 2020년 본예산의 낙찰차액 등 집행잔액을 활용하여 민원처리

- 2020년 본예산 집행잔액 : 90백만원

구 분	예산현액	계약금액	낙찰차액 등 잔액
합 계	1,100,000,000	1,009,795,900	90,204,100
도 급 비	718,980,000	628,775,900	90,204,100
관급자재비	306,031,000	306,031,000	-
이 전 비	74,989,000	74,989,000	-

○ 정비(예정)구간

- 가용예산 : 934백만원(추경 844백만원, 잔액 90백만원)

연번	위치	정비규모	예산액 (백만원)
합계	16건		934
1	보국문로29길 일대	아스팔트정비, B=3~5m, L=360m	144
2	솔샘로25길 일대	아스팔트정비, B=8~9m, L=160m	160
3	솔샘로16길 일대	아스팔트정비, B=6~8m, L=320m	120
4	오패산로3길 일대	아스팔트정비, B=3~6m, L=70m	20
5	종암로24길	아스팔트정비, B=9m, L=10m	10
6	정릉로12길 일대	아스팔트정비, B=4~7m, L=200m	48
7	정릉로10길 36	보도블록정비, B=2~2.5m, L=100m	40
8	길음로15가길 53	보도블록정비, B=2~2.5m, L=10m	10
9	정릉로9나길 일대	아스팔트정비, B=8~12m, L=140m	44
10	고려대로5길 일대	보도 및 아스팔트정비, B=6~8m, L=140m	88
11	정릉로9길 16	아스팔트정비, B=6~8m, L=320m	40
12	보국문로29길 회차구간	아스팔트정비, B=3~5m, L=160m	62
13	오패산로3길 136-30	아스팔트정비, B=3~5m, L=110m	20
14	화랑로18마길 3	보도블록정비, B=2~2.5m, L=20m	5
15	회기로5길 100	아스팔트정비, B=7~15m, L=720m	90
16	성북구 관내	기타민원해결	33

□ 향후계획

○ 2020. 10. ~ 11. : 작업지시 및 설계변경

○ 2020. 12. : 공사준공

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.