코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경(준공기한 연장) 의뢰

1. 도시농업과-호 관련입니다.

2.「서울형 케어팜 시범단지 조성공사 실시설계용역」준공기한 연장을 위한 용역 계약변경을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울형 케어팜 시범단지 조성공사 실시설계용역

나. 계약업체 : *********

다. 계약금액 : *********************

라. 변경사항 : 계약기간 연장

- (변경 전) ’20. 7.8. ~ ’20. 9. 29. → (변경 후) ’20. 7. 8. ~ ’20. 11.30.

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 용역 연장방침 1부.  끝.

							도시농업과장
★주무관							강명희			도시농업조성팀장					김형금					도시농업과장					09/25 김광덕
협조자
시행			도시농업과-15051									(						)		접수											(						)
우	04514					서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 18층 도시농업과															/
전화		02-2133-5397						/전송			02-768-8945					/	gangmaeng@seoul.go.kr												/	부분공개(5)