문서번호	도로관리과-14909
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
이병석		호경수	09/25 김진효
협 조

‘20년 관악구 방호울타리 설치 계획 변경

2020. 9.

도로관리과

’20년 관악구 방호울타리 설치 계획 변경

관악구 난곡로 방호울타리 변경 설치 후 발생한 집행 잔액을 교통사고가 많아 긴급 설치를 요하는 지역에 변경 설치 하고자 함.

□ 사업개요

○ 건    명 : 관악구 난곡로 방호울타리 설치공사

○ 설치사유 : 보행자 안전확보(교통사고 잦은 급경사, 급커브 도로)

○ 규    모 : H=1m, L=800m

○ 공 사 비 : 200,000천원

□ 추진경위

○ ’19.06.04 : 난곡로 방호울타리 설치 요청(관악구 → 도로관리과)

○ ’19.07.08 : 자치구 추경예산 편성 신청(관악구 교통행정과)

※ 신청금액 : 200,000천원

○ ’19.12.23 : 난곡로 방호울타리 설치 완료(관악구 도로관리과)

※ 규    모 : H=1m, L=600m

○ ’20.02.24 : 난곡로 방호울타리 설치예산 재배정(도로관리과→관악구)

○ ’20.07.31 : 난곡로 방호울타리 설치 완료(관악구 도로관리과)

※ 규    모 : H=1m, L=200m

○ ’20.09.14 : 재배정 예산 집행잔액 활용계획(변경) 승인요청(관악구→도로관리과)

□ 검토내용

○ 관악구에서 ‘20년 난곡로 방호울타리 설치 예산을 신청하였으나 보행자

안전의 시급성을 감안하여 우선, 총 800m 중 600m를 ‘19년 자치구 추경

예산에 반영하여 기 설치 하였음.

○ ’20년 난곡로 방호울타리 설치 예산이 재배정 되어 잔여구간 200m 설치 후 남은 예산은 교통사고 잦은 지역에 변경 설치.

- ’20년 난곡로 방호울타리 설치 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		재 배 정 액
	계	당해년도	계	재배정액	집행액	집행잔액
방호울타리 설치	200,000	200,000	200,000	200,000	27,271	172,729

- 난곡로 방호울타리 계획 변경 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	변경 설치 사유
공사규모	H=1m, L=800m	H=1m, L=200m	- 일부구간 ’19년 자치구 추경예산으로 기 시행(L=800m 중 600m) - 잔여구간 ’20년 설치완료(L=200m)
공 사 비	200,000	27,271

- 관악구 관내 방호울타리 설치 계획 변경 대상

(단위 : 천원)

구 분	위 치	규 모	사업비	대상지 선정사유
계		L:1,050m	162,729
호암로 방호울타리 설치	호암로 498~518 (도로 폭 20m)	H:1m, L:250m	42,729	초등학교,고등학교 등 교통 사고 잦은 장소
보라매로 방호울타리 설치	보라매로 723~726-6 (도로 폭 25m~30m)	H:1m, L:300m	45,000	무단횡단, 급경사 커브 등으로 교통사고 잦은 장소
신사로 방호울타리 설치	신사로 496~난곡로 374 (도로 폭 20m)	H:1m, L:500m	75,000

□ 조치계획

○ ‘20년 난곡로 방호울타리 설치 후 잔여 예산은 초등학교 주변 등 교통

사고가 잦아 보행자 안전 확보가 필요한 지역에 변경 설치 하고자 함.

- 예산 재배정(조정) 변경 계획

(단위 : 천원)

구 분	기배정액	집 행	2020년 예산		비 고
			요청액	금회 재배액(조정액)
계	200,000	27,271	162,729	162,729	- 잔액 10,000
난곡로 방호울타리 설치	200,000	27,271	△162,729	-
호암로 방호울타리 설치	-	-	42,729	42,729
보라매로 방호울타리 설치	-	-	45,000	45,000
신사로 방호울타리 설치	-	-	75,000	75,000

- 예산과목 : 도로시설물 관리, 도로 및 도로 부속물 관리, 자치구 위탁관리 도로시설물 보수보강, 시설비

□ 향후 추진계획

○ 2020. 9. : 예산 재배정(도로관리과 → 관악구)

○ 2020.11.  : 공사 완료

《붙 임》 : 1. 방호울타리 설치 대상지 현황 1부.

2. ’20년 자치구 위탁관리 방호울타리 예산 재배정 방침서 1부.

3. 관악구 재배정 예산 집행잔액 활용계획(변경)승인요청 1부.  끝.