문서번호	토목부-18717
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
최승룡		代최승룡	09/25 김용제
협조

「세종대로 도로공간 재편사업(1구역)」

현장비빔 콘크리트 변경에 대한 검토보고

2020. 09.

도시기반시설본부

(토  목  부)

「세종대로 도로공간 재편사업(1구역)」

현장비빔 콘크리트 변경에 대한 검토보고

「세종대로 도로공간 재편사업(1구역)」감리단에서 제출한 레미콘 현장비빔 콘크리트 변경 서류가 접수되어 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련문서

❍ 세종수2020-056호,‘20.09.14) : 레미콘 현장비빔 콘크리트 변경건에 대한 검토보고

Ⅱ		사업개요

○ 규    모 : 차로축소(2~3차로), 보도확장 및 자전거도로 설치

- 판석포장 7,853㎡, 아스콘포장 15,670㎡, 보차도경계석 2,202m, 빗물받이 85개소, 선배수로 1,079m, 표지판신설 14개소

○ 사업기간 :‘20.07.16. ~‘20.12.31.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링 외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 실정보고

❍ 관급자재인 레미콘의 반입 불가에 따른 현장 기계비빔 콘크리트로 변경에 대한 적정성을 검토 보고임.

❍ 설계현황

- 본 공사의 L형측구, 구조물 기초, 판석포장 기초의 콘크리트는 레미콘으로 포설토록 되어 있음.

❍ 변경사유

- 본 공사는 야간 시간대(10:00PM ~ 06:00AM) 시행하는 공사 공사로서,

- 조달청 및 서울·경인레미콘공업협동조합에 레미콘의 구매 가능여부 문의결과 종로구, 중구지역은 납품 불가 회신

※ 서경(사) 제104호(2020.07.22.), 자재구매과-16298호(2020.07.23.)

❍ 신규단가 검토

구 분	신규단가 적용 내용(협의율 94.976%)						비고
	공 종	규 격	단위	단 가	표준시장단가	표준품셈
설계변경 시 점	- 2020.07.23(조달청의 레미콘 수급 불가 통보공문 접수일, 자재구매과-16298호)
신규비목산정조건	1) 표준시장단가 : 2020년 하반기(2020.05) 2) 표준시장단가가 없는 경우 표준품셈(2020년) 적용 - 자재비 : 2020년 7월(가격정보, 물가자료, 물가정보, 거래가격) - 노무비 : 2020년 상반기 - 경 비 : 유류(2020년 7월 오피넷 대리점가), 환율(2020.07.31. 매매기준율)
신규단가 적 용	무근콘크리트(18MPa)	기계비빔	㎥	259,727		259,727
	무근콘크리트(21MPa)	기계비빔	㎥	264,742		264,742
	무근콘크리트(24MPa)	기계비빔	㎥	267,605		267,605
	철근콘크리트(21MPa)	기계비빔	㎥	246,709		246,709

※ 신규단가 협의율 : (89.952% + 100%) / 2 = 94.976%

❍ 수량 증·감

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증ㆍ감
□ 콘크리트 현장비빔
a. 무근콘크리트(18MPa)	기계비빔	㎥	-	781	781
b. 무근콘크리트(21MPa)	기계비빔	㎥	-	54	54
c. 무근콘크리트(24MPa)	기계비빔	㎥	-	60	60
d. 철근콘크리트(21MPa)	기계비빔	㎥	-	105	105
소 계			-	1,000	1,000
□ 관급자재비
a. 레미콘	25-18-80	㎥	781	-	-781
b. 레미콘	25-21-80	㎥	219	-	-219
소 계			1,000	-	-1,000
합 계			1,000	1,000	-

❍ 공사비 증·감

구 분	당 초	변 경	증 · 감
직접공사비	-	259,103,600	259,103,600
제 경 비	-	137,160,037	137,160,037
공 급 가 액	-	396,263,637	396,263,637
부가가치세	-	39,626,363	39,626,363
도급공사비 계	-	435,890,000	435,890,000
관급자재비	62,314,249	-	-62,314,249
총 공 사 비	62,314,249	435,890,000	373,575,751

Ⅳ		감리단 검토의견

❍ 상기 검토내용과 같이 야간 레미콘 반입이 불가능하고, 현장 여건(소량 타설, 도심지 공사 등)을 감안할 때 부득이 레미콘을 현장 기계비빔 콘크리트로 변경해야 할 것으로 사료되며,

❍ 이에 따른 산출내역도 검토 결과 적정하다고 판단되므로 증액되는 공사비 373,575천원에 대하여는 본부 승인 후 설계변경 자문회의를 거쳐 결과에 따라 추후 설계변경시 반영코자 함.

Ⅴ		조치계획

❍ 관급자재인 레미콘 현장반입 불가로 현장 비빔에 대한 검토내용으로 건설사업관리단의 의견이 타당하다고 판단되는바, 이를 승인하여 사업 시행에 만전을 기하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  관련자료 1부.    끝.