문서번호	토목부-18722
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
최승룡		代최승룡	09/25 김용제
협조

「개봉철도고가 성능개선공사」

공사중 교통통제수 반영에 대한 검토보고

2020. 09.

도시기반시설본부

(토  목  부)

「개봉철도고가 성능개선 공사」

공사중 교통통제수 반영에 대한 검토보고

「개봉철도고가 성능개선 공사」감리단에서 제출한 공사중 교통 통제수 반영에 대한 실정보고가 접수되어 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련문서

❍ 실정보고(유신개철20-202호,‘20.08.19) : 실정보고 승인요청(공사중 교통통제수 반영)

Ⅱ		공사개요

❍ 사업규모 : 교량성능개선(DB18→DB24) B=23m, L=149m

❍ 공사기간 : `19.05.03. ~ ‘21.11.02.

❍ 도 급 비 : 13,241백만원(3차 : 1,048백만원)

❍ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)

❍ 감 리 사 : ㈜유신 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 실정보고

❍ 당초 설계시 원활한 교통소통 확보와 교통장애 민원을 방지하기 위해 교통로봇과 보행도우미를 반영하였으나 현장 여건에 부합되지 못하여 서울지방경찰청 통보내용과 같이 교통신호수를 배치하는 실정보고를 검토하고 그 결과에 대한 보고임.

❍ 설계반영 현황

1. 공    종 : 공사중 교통안전시설물공

2. 수    량 : 교통로봇 설치 및 철거 2개

3. 금    액 : 4,000천원(제경비 포함)

❍ 교통안전시설 개선설치 통보내역 요약(서울지방경찰청)

1. 기    간 : 2019.8.9.~2021.11.30.(총28개월) 주야간공사

2. 개선내용

- 단계별 공사중 교통처리계획에 의거 공사시행

- 차로재구획, 교통안전표지 및 노면표시 설치 등

※ 출퇴근시간 공사차량 통행제한 및 공사구간 교통신호수 배치

3. 행정내용

- 서울시(교통운영과장)

교통처리계획도 참조 교통안전시설 설치관리 매뉴얼에 맞게 설치

- 서울시(도시기반시설본부장)

현장 교통관리 : 관할경찰서장 협의,

안전시설물 : 서울시 교통운영과 협의, 교통혼잡을 줄이고 안전확보(공사구간 통제수 배치하여 교통혼잡 방지)

❍ 감리단 검토내용

1. 법적 근거(건설기술진흥법에 의한 교통통제수 반영)

- 건설기술 진흥법

제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 "안전관리비"라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

- 건설기술 진흥법 시행규칙

제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용 (이하 "안전관리비"라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다.

4. 제1항제4호의 비용: 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치 비용 및 신호수(信號手)의 배치비용에 관해서는 토목ㆍ건축 등 관련 분야의 설계기준 및 인건비기준을 적용하여 계상

2. 배치인원 산출근거 검토(단계별 주간, 야간 교통통제)

단 계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	계
인 원	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	3	5	50
일 수	60	60	7	7	2	3	13	270	240	7	7	120	45	841
보통인부 전용	120	180	21	21	8	12	52	1,080	1,200	35	35	360	225	3,349
보통인부+로봇혼용	0	60	7	7	4	6	26	540	720	21	21	120	135	1,667

3. 단가 및 금액 검토

(단가 : 원, 금액 : 백만원)

구 분	단위	시공사 1안			시공사 2안			감리단 검토안
		신호수			신호수			로봇+신호수
		모범운전자			보통인부			보통인부
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액
주 간	인	3,207	151,893	487	3,207	131,282	421	1,589	131,282	208
야 간	인	142	227,839	32	142	196,924	28	78	196,924	15
안전관리비	인			519			449			224
간접공사비	식			143			124			62
도급공사비	식			662			573			286
채 택 안								◎

4. 향후 투입 및 정산방법

- 금번 교통통제수 투입인원 반영건은 서울지방경찰청의 교통안전시설 설치개선 통보에 의한 것이므로 추후 현장여건을 고려하여 사전 투입계획 및 실 투입인원을 건설사업관리단의 확인을 받아 교통통제수를 투입하고, 향후 실 투입인원 정산

❍ 수량 증·감

구 분	단위	당 초	변 경	증ㆍ감		비 고
교통로봇 설치 및 철거	EA	2	2	증)	0
교통통제수(보통인부,주간)	인	-	1,589	증)	1,589
교통통제수(보통인부,야간)	인	-	78	증)	78

❍ 공사비 증·감

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감		비 고
직접공사비	3,115	3,115	증)	-
각종 보험료 등 제경비	40	40	증)	-
건진법 안전관리비	-	223,967	증)	223,967
교통통제수(보통인부, 주간)	-	208,607	증)	208,607
교통통제수(보통인부, 야간)	-	15,360	증)	15,360
일반관리비	154	11,129	증)	10,975
이 윤	327	25,285	증)	24,958
부가가치세	364	26,354	증)	25,990
도급공사비	4,000	289,890	증)	285,890
관급자재대	-	-		0
총 공 사 비	4,000	289,890	증)	285,890

Ⅳ		감리단 검토의견

❍ 당 현장은 도심지 과선교 특성상 교통우회 및 전환이 빈번하여 교통 불편으로 인한 민원발생이 우려되는 현장임.

❍ 당초 서울시의 교통소통대책 자문회의와 서울지방경찰청과의 교통안전 시설 협의사항을 고려하여 교통신호수를 배치토록 설계되어 있으나 기 설계된 교통로봇의 배치만으로는 주변 교통량에 따른 교통통제가 어려운바 교통신호수를 추가 배치하여 원활한 교통흐름과 민원발생 억제함이 타당함.

❍ 이에 현장여건에 부합되도록 실 투입 교통신호수를 배치하고, 추후 설계 변경 시 건설사업관리단의 확인을 받아 실 투입인원에 따른 교통처리비를 정산 반영코자 함.

❍ 상기공사에 소요된 공사비를 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경)에 따라 설계반영 하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

Ⅴ		조치계획

❍ 교통신호수 배치에 대한 검토내용으로 건설사업관리단의 의견이 타당 하다고 판단되는바, 이를 승인하여 안전사고를 예방하고, 추후 설계 변경 정산하고자 함.

붙임  관련자료 1부.    끝.