문서번호	도시농업과-15005
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	도시농업조성팀장	도시농업과장
강명희	김형금	09/25 김광덕

- 서울형 케어팜 시범단지 조성공사 실시설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2020. 9.

경제정책실

(도시농업과)

- 서울형 케어팜 시범단지 조성공사 실시설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

「서울형 케어팜 시범단지 조성공사 실시설계용역」추진 중 현안 사항이 발생하여 준공기한 연기에 대해 검토하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ	용역개요

□ 건    명: 서울형 케어팜 시범단지 조성공사 실시설계용역

□ 기    간: 2020. 7. 8. ~ 9. 29.

□ 계약금액: **********

□ 용역업체: ***************

□ 용역내용: 옥상·무장애 텃밭 조성을 위한 실시설계용역

Ⅱ	현안사항

□ 서울형 케어팜 시범단지 조성공사 중 옥상텃밭 조성을 계획한 은평의 마을 생활관의 구조안전진단 결과 옥상텃밭 조성이 불가(적재하중을 위한 단순보의 부재내역 부족)하여 대상지 변경 필요

□ 대상지 변경 후 옥상텃밭 조성 전 대상지 옥상층의 구조안전진단용역을 실시해야하는 상황으로 절대공기 부족

Ⅲ	조치계획

□ 현안 사항과 같이 용역 수행을 위한 용역기간 연장이 불가피하므로 아래와 같이 용역기간을 연장하고자 함.

구분	변경사항		비고
	변경 전	변경 후
용역기간	’20.7.8. ~ 20.9.29.	’20.7.8. ~ ’20.11.30.	증 61일

□ 지체상황금 부과여부: 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 및 합의각서(안) 각 1부

2. 서울형 케어팜 조성 대상지 변경 검토 보고서 1부.  끝.