문서번호	건축부-16649
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
이승현		박근우	09/29 이창구
협 조

「서울 운현궁 보수공사」

계약변경(1차-2회·총차-2회) 시행 검토보고

2020. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「서울 운현궁 보수공사」

계약변경(1차2회·총차2회) 시행 검토보고

「서울 운현궁 보수공사」관련 감리원으로부터 제출된 설계변경(1차2회·총차2회) 요청에 대해 검토 보고 드림

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 서울 운현궁 보수공사 (장기계속)

*********************************************

○  공사기간 :′19.08.01. ~′21.01.31. (1차 기간 : ’19.8.1.~’20.9.30.)

****************************

○  감 리 사 : ㈜경복영건

□ 설계변경 내용

○  관련근거

- 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제12조(설계변경 등)

○  추진경위

- ’19.08.01.   : 공사 착공

- ’19.08.~10. : 문화재 자문회의 (1·2차)

- ’20.02.18.   : 실정보고 승인 (1차공사 1~4회, 총차공사 1~2회)

- ’20.02.~06. : 문화재 자문회의 (3·4·5차)

- ’20.09.09.   : 실정보고 승인 (1차공사 5회, 2차공사 1회)

- ’20.09.24.   : 설계변경(1차2회) 검토보고 (감리원→건축부)

○  계약금액 변경(총차 및 1차분)

(단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증감
계약 금액	총차	***********	***********	*************
	1차	***********	***********	*************
공사 기간	총차	2019. 08. 01.~2021. 01. 31.	2019. 08. 01.~2021. 01. 31.	변경 없음
	1차	2019. 08. 01.~2020. 09. 30.	2019. 08. 01.~2020. 09. 30.	변경 없음

○  주요 변경사유 및 내용 (※세부내용 : 붙임 변경내역 참조)

- 문화재 수리 자문의견 및 현장상태 반영

: 현장 내 가설방음판, 강관비계 등 실제 설치기간 반영

: 뒷마당 담장 차폐용 조릿대 및 관목 식재 물량 추가

: 운현궁 내 무대철거 후 잔여구조물(무근콘크리트) 상차비 반영

구 분		직접공사비		증 감		비고
		변 경 전	변 경 후
건축	- 가설방음판 설치기간 변경 (현장사무실)	*********	*********	**	*******	**** *****
	- 비계매기, 안전발판 기간 변경 - 가설방음판 설치기간 변경 (노락당, 이로당, 노안당)	***********	***********	**	*********	**** *****
조경	차폐용 조릿대, 관목 식재	**********	**********	**	*********	**** ****** *****
폐기물	상차비(무근콘크리트 깨기)	*******	*******	**	*******	**** ****** *****
계		***********	***********	**	*********

○  단가 적용기준 (공사계약 일반조건 제7절)

- 기존 비목 단가(물량 증․감) : 계약단가 적용

- 신규 비목 단가 : 설계변경 당시를 기준 산정 단가 × *******************

□ 감리원 검토의견

○  문화재 자문회의 및 현장여건 등을 반영한 설계변경(1차2회·총차2회) 계약금액 조정사항을 검토한 결과 변경사유, 적용단가 및 수량 등이 관련근거에 따라 적정 반영됨.

□ 처리의견

○  해당 감리원의 검토의견에 따라 공사에 대한 설계변경 [총차·1차분(2회)계약금액 조정]을 시행코자 함.

붙임 : 1. (감리자) 총차·1차(2회) 설계변경 검토의견서

2. (시공사) 총차·1차(2회) 설계변경 관련서류

3. 계약금액조정 검증확인서(1차2회 및 총차2회).  끝.