문서번호	도서관정책과-9968
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도서관정책과장	서울도서관장
이효성		안옥연	09/29 이정수
협조

서울시 공공도서관 시민서비스 성과조사 용역 계약 변경계획

2020. 9.

서울도서관

(도서관정책과)

서울시 공공도서관 시민서비스 성과조사 용역 계약 변경계획

<서울시 공공도서관 시민서비스 성과조사>를 추진함에 있어 코로나 19 감염병 확산으로 도서관의 휴관 및 서비스 제한이 장기화됨에 따라 준공기한 연기 및 조사수행 세부내역 조정이 필요함에 따라 변경계약하고자 함

1		계 약 개 요

○ 계 약 명: 서울시 공공도서관 시민서비스 성과조사 용역

○ 계약번호: 2020050FDD4-00

○ 계약기간: 2020.5.26.~2020.10.26.

○ 계약금액: **************************

○ 계약업체: *****************

○ 과업내용

- 성과조사 추진을 위한 평가분야 전문가협의체 구성․운영

- 성과조사를 위한 평가요소 구체화 및 성과조사를 위한 조사설계

- 도서관 서비스 경험자 2,126명 대상 심층면접조사 및 설문조사(가구방문) 등

2		변 경 내 용

□ 주요 변경내용

○ 용역기간 연장

- 변경기간: 기존 ‘20.5.26.~10.26. ⇨ 변경 ’20.5.26.~12.10(45일 연장)

- 변경사유: 코로나 19 감염병 확산 장기화로 사회적 거리두기 지침이 공공기관에 적용되어 도서관 장기 휴관 및 프로그램 등의 서비스가 제한됨에 따라 조사수행에 어려움이 있어 용역기간을 연장하여 과업을 수행하고자 함

○ 과업내용 변경

- 변경내용: 대면 설문조사→온라인 설문조사

- 변경사유: 코로나 19 감염병 확산으로 도서관 이용과 서비스 제공이 제한됨에 따라 기존 서비스 경험자 대상 설문조사에 어려움이 있어 온라인 설문조사로 조사방식을 변경하고자 함

- 세부변경사항

구분	당초	변경	비고
인력운영	***	*****	**
심층면접	*******	*******	****
	******	********	**
조사	*************	******************	**
	*	************ ****	**
	*	********** ********	**
	*	************	**
협의체 운영	*********	*	**
유인물	*******	************	**
전산처리	***********	***********	****

□ 사업비 변경 내역

내역	당초	변경	사유
인건비	***********	***********	*******************************************************************************************
실사비	***********	***********
유인물비	*******	*******
전산처리비	********	*********
일반관리비 및 이윤	*********	*********
부가세	**********	**********
합계	*********** ***********	*********** ***********

3		추 진 일 정

○ 계약변경의뢰: ‘20.9.29.(화)

○ 계약준공: ’20.12.10.(목)

○ 준공금 지급: ‘20.12.18.까지

붙임 1. 코로나19확산에 따른 도서관 휴관 및 서비스 제한 현황 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 산출내역서(기존/수정) 각1부.

4. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.