문서번호	조경과-13082
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
이호연		이현삼	10/07 문길동
협 조

- 친환경 수공간 조성사업 -

공사비 추가 지원 검토보고(광진구)

2020. 10.

푸른도시국

(조경과)

- 친환경 수공간 조성사업 -

공사비 추가 지원 검토보고(광진구)

광진구 광나루로 주변  ‘친환경 수공간 조성사업’ 관련 추가 공종 발생에 따른 예산 지원 요청에 대해 아래와 같이 검토하고 보고 드림.

- 광진구 공원녹지과-15021호(2020.9.29.) -

□ 사업개요

○ 위    치 : 광진구 능동 18-14 일대 (광나루로 주변 실개천)

○ 규    모 : 4,000㎡

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

○ 사업내용 : 노후 수경시설물 정비 및 수목식재 등

○ 총사업비 : 400백만원 (설계비 20, 공사비 380)

□ 검토결과

○ 현장여건에 따른 추가 공종 발생으로 공사비 증액 : 50,000천원

(단위:천원)

요청액	추가 지원 요청 사유	검토결과
50,000	․수경시설(실개천)과 연접한 녹지대의 노후 축대 정비 및 토사유출방지를 위한 수목식재 등 추가 공종 발생	’20년 친환경 수공간 조성사업 배정잔액 (유보금 등)을 활용하여 지원

○ 추가 공종 발생에 따른 증액분 공사비를 광진구에 재배정하여 연내 공사가

원활히 준공될 수 있도록 신속히 지급

□ 조치계획

○「친환경 수공간 조성사업」배정잔액 예산을 활용 광진구 지원

(단위:천원)

예산현액	기 재배정액	재배정 잔액	금회 지원액	비 고
400,000	380,347	19,653	50,000	시설비

○ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충,

친환경 수공간 조성, 시설비및부대비, 시설비

붙임  관련공문 1부.  끝.