문서번호	계약심사과-17405
결재일자	2019.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
박홍		노형근	10/08 代김형일
협 조

응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 설계경제성 심사(VE) 실행계획

2019. 10.

재   무   국

(계약심사과)

응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계

설계경제성 심사(VE) 실행계획

도기본(방재시설부) 시행「응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계」에 대해 설계VE전담팀을 구성하고, 설계경제성 심사(VE)를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 설계경제성 심사 신청(방재시설부-14602. ‘19. 10. 1.)

2		심사 요청 개요

□ 신청부서 : 도기본 방재시설부

□ 사 업  명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계

□ 위    치 : 성동구 고산자로 125-98(응봉유수지 내)

□ 사업내용 : 강우시 발생하는 합류식 하수관로 월류수(CSOs) 저류조 설치

- 부지면적 : 6,770㎡, 시설용량 4,000㎥

□ 공 사 비 : 8,968백만원

□ 사업기간 : 2020.07. ~ 2021.12.

□ 설계공정률 : 80%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진 방법 : VE전담팀을 구성하여 설계경제성 심사(VE)

○ VE심사팀, 발주부서, 설계사 등 21명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸노형근 토목심사2팀장 계약심사과 ▸박 홍 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸허재영 위원 한국가치기술연구소	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸유대한 연구원 한국가치기술연구소	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (7개 분야)	▸(토목구조) 최용기 위원 ㈜대한콘설탄트 ▸(토목시공) 백동진 위원 동명기술공단 ▸(토 질) 여규권 위원 삼부토건(주) ▸(상하수도) 조현석 위원 KG엔지니어링 ▸(건축계획) 정미숙 위원 무영종합건축사 ▸(전 기) 송하봉 위원 창대티이씨 ▸(기 계) 김대한 위원 환경시설	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	▸차성민 주무관 도기본 방재시설부	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(9명)	▸이종복 상무 ㈜제일엔지니어링 ▸김광인 차장 ㈜제일엔지니어링 ▸분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
’19. 10. 24.(목) 10:00~17:00	- 사업설명 및 질의응답, 기능분석, 현장답사 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실 및 현장
’19. 10. 29.(화) 10:00~17:00	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 11. 6.(수) 10:00~17:00	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 11. 7.(목)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (계약심사과 ⇒ 도기본 방재시설부)
’19. 11. 14.(목)	- VE 제안 채택결과 회신 (도기본 방재시설부 ⇒ 계약심사과)
’19. 11. 21.(목)	- 설계경제성 심사(VE) 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 도기본 방재시설부)

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19. 10. 1.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19. 10. 8.		설계경제성 심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 경 제 성 심 사 (VE) 운 영		’19. 10. 24. ~ ’19. 11. 6. (1일차~14일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2,3차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의
		’19. 11. 7. (15일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸설계경제성 심사(VE) 제안서 통보
		’19. 11. 14. (22일차)		VE 제안 채택결과 회신 (발주부서 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사(VE) 제안서 수용 여부 결정 및 통보
		’19. 11. 14. ~ ’19. 11. 20. (28일차)		설계VE 심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 심사 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’19. 11. 21. (29일차)		설계VE 심사결과 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요 예산

□ 총금액 : 11,785천원

○ 외부위원 수당 : 11,285천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,472천원(2,472천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 7,973천원(1,139천원 × 7명)

- 진행보조요원(중급기술자)    : 840천원(840천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(도기본 방재시설부)

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후 계획

□ 설계VE 심사 결과 통보 : ’19.11.21.(예정)

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.