투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 및 계약기간 연장으로 인한 변경계약 의뢰(수정)[서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사(2차)]

1. 설비부-15213호(2020.10.07.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사(2차)」에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사(2차)

나. 변경내역

구분	차수	변 경 내 역		비고
		변경 전	변경 후
계약 기간	총차	`19.04.08. ∼ `20.10.07.	`19.04.08. ∼ `21.07.30.	증) 296일
	2차	`20.09.01. ~ `20.10.07.	`20.09.01. ~ `21.07.30.	증) 296일
계약 금액	총차	**************	**************	**************
	2차	**************	**************	**************

다. 변경사유 : 고용개선지원비 반영 및 선행공정 공사기간 연장

붙임  1. 설계변경 및 계약기간 연장 검토보고 1부.

2. 건설사업감리단 검토보고서(합의각서 포함) 1부.

3. 2차 내역서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	마권택		건축설비과장	김은덕		설비부장	10/07 이달영
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	설비부-15254	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	whycut@seoul.go.kr	/	부분공개(5)