문서번호	뉴미디어담당관-11072
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	홈페이지팀장	뉴미디어담당관
서은지	전성권	10/07 이종선

2020년 서울시 정보접근성 및 호환성 진단 용역

월 간 업 무 보 고 (9월)

2020.  10.

시민소통기획관

(뉴미디어담당관)

「2020년 서울시 정보접근성 및 호환성 진단 용역」

월 간 업 무 보 고 (9월)

「2020년 서울시 정보접근성 및 호환성 진단 용역」사업의 월간

추진실적 및 차월 계획을 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2020년 서울시 정보접근성 및 호환성 진단 용역

○ 사업기간: ‘20.06.17. ~12.13.(6개월)

○ 사업내용

- 시 및 투자출연기관 운영 웹 및 앱 실태조사

- 시 홈페이지 웹접근성 품질인증 심사

- 시 및 투자출연기관 운영 웹 웹표준 및 호환성 실태조사

□ 추진실적

○ 추진 기간: 2020.09.01. ~ 09.30.

○ 총괄진척률: 계획(61.5%)/실적(61.5%)

○ 추진 내용

구분		정보접근성					웹표준 및 호환성
		합계	실태조사		품질인증
			웹	앱	신규	갱신
조사대상(당초)		146	69	27	6	44	155
조사대상(변경)		140	62	26	14	38	155
추진실적	금월	38	20	10	3	5	0
	누계	86	47	17	3	19	0
진척률		61.4%	75.8%	65.4%	21.4%	50.0%	0%

※ 웹표준 및 호환성은 ‘20년 홈페이지 평가일정에 맞추어 진행 : ‘20.11.02.~27.

□ 주요실적

○ 정보접근성 실태조사 추진 (PC웹 20건, 앱 10건)

- PC 웹접근성 실태조사 결과 (PC웹 20건)

연번	사이트명	2019년		2020년 웹접근성 실태조사
		전문가	오류 건수	개선 건수	개선 비율	전문가	전맹	저시력	뇌병변
1	자원회수시설	****	**	*	**	****	*	*	*
2	서울안전누리	****	**	**	***	****	*	*	*
3	상생교류협력	****	**	*	**	****	*	*	*
4	서울기업지원센터	****	*	*	**	****	*	*	*
5	도시건축센터	****	*	*	***	****	*	*	*
6	디지털시민시장실	****	**	**	***	****	*	*	*
7	한양도성	****	**	*	***	****	*	*	*
8	서울우수공공디자인	****	**	**	***	****	*	*	*
9	국제교류복합지구	****	**	**	***	****	*	*	*
10	평생학습포털	****	**	****		****	*	*	*
11	공동체주택	****	**	**	***	**	*	*	*
12	생활권계획	****	**	**	***	****	*	*	*
13	햇빛지도	****	**	*	**	****	*	*	*
14	시민건강포인트	****	**	*	**	****	*	*	*
15	교통유발부담금 경감 관리시스템	****	**	*	**	****	*	*	*
16	서울책방	****	**	*	**	****	*	*	*
17	지반정보통합관리시스템	****	**	*	**	****	*	*	*
18	물관리정보 열린공개시스템	****	**	*	**	****	*	*	*
19	눈물그만 상담센터	****	**	*	**	****	*	*	*
20	교통정보센터	****	**	****		**	*	*	*

- 모바일 앱 접근성 실태조사 결과 (Android/iOS 10건)

연번	앱 명칭	2019년		2020년 웹접근성 실태조사
		전문가	오류 건수	개선 건수	개선 비율	전문가	전맹	저시력	뇌병변
1	내 손안에 서울(And)	**	**	*	***	****	*	*	*
	내 손안에 서울(iOS)	****	**	*	***	****	*	*	*
2	서울시평생학습포털(And)	****	*	*	**	****	*	*	*
	서울시평생학습포털(iOS)	****	*	*	**	****	*	*	*
3	서울 일자리포털(And)	****	**	*	***	****	*	*	*
	서울 일자리포털(iOS)	****	*	*	**	****	*	*	*
4	서울시 엠보팅(And)	**	**	*	***	****	*	*	*
	서울시 엠보팅(iOS)	****	*	*	***	****	*	*	*
5	엔젤아이즈(iOS)	**	*	*	**	**	*	*	*
6	엔젤아이즈 도우미(And)	****	*	*	**	****	*	*	*
	엔젤아이즈 도우미(iOS)	****	*	*	**	****	*	*	*
7	서울시 안심이(And)	***	*	*	**	****	*	*	*
	서울시 안심이(iOS)	***	*	*	**	**	*	*	*
8	서울시민카드(And)	****	*	*	**	****	*	*	*
	서울시민카드(iOS)	**	*	*	**	****	*	*	*
9	서울시 소비재 정보마당(And)	**	*			****	*	*	*
	서울시 소비재 정보마당(iOS)	**	*			**	*	*	*
10	서울안전(And)	****	*	*	**	****	*	*	*
	서울안전(iOS)	****	**	*	**	****	*	*	*

○ 웹 접근성 품질인증 (신규 3건, 갱신 5건)

- 신규: s-apt플랫폼(‘20.9.1.), 서울브랜드(‘20.9.1.), 서울기록원(‘20.9.15.)

- 갱신: 시의회(‘20.11.2.), 농업기술센터(‘20.11.12.), 어린이병원(‘20.11.24.), 정보소통광장(‘20.11.26.), 한강사업본부(‘20.11.30.)

※ 품질인증 기준일은 한국정보화진흥원 인증서 신고일 기준으로 갱신

○ 웹 실태조사 보고서(20부), 앱 실태조사 보고서(10부)공문 통보 예정

○ 협의사항

- 실태조사(웹)에서 품질인증(갱신)으로 변경: 집합건물통합정보마당

- 품질인증(갱신)에서 품질인증(신규)으로 변경: 민주주의 서울(리뉴얼)

- 품질인증(신규)에서 실태조사(웹)로 변경: 서울공예박물관

□ 10월 계획

○ 웹 접근성 실태조사(11개), 앱 접근성 실태조사(6개) 추진

연번	웹 실태조사(11개)		앱 실태조사(6개)
	사이트명	심사일자	사이트명	심사일자
1	라이브서울	10.5-10.8	서울도서관 공식앱	10.5-10.8
2	서울공예박물관	10.5-10.8	놀토서울	10.12-10.16
3	서울역사박물관(영문)	10.12-10.16	서울시립미술관 전시도슨팅	10.12-10.16
4	서울역사박물관(일문)	10.12-10.16	서울한양도성	10.19-10.23
5	서울역사박물관(중문)	10.12-10.16	서울 여행의 모든 것 (i Tour Seoul)	10.26-10.30
6	서울대공원(영문)	10.19-10.23	서울대공원	10.26-10.30
7	서울대공원(중문)	10.19-10.23
8	서울시농수산식품공사	10.19-10.23
9	서울장학재단	10.19-10.23
10	서울시립교향악단	10.26-10.30
11	교통방송 대표 홈페이지	10.26-10.30

○ 웹접근성 품질인증 신규(2개), 갱신(12개) 추진

연번	품질마크 신규(2개)		품질마크 갱신(12개)
	사이트명	심사일자	사이트명	심사일자
1	집합건물통합정보마당	10.12-10.16	응답소	10.5-10.8
2	주민참여예산	10.26-10.30	서울시 대표 홈페이지	10.5-10.8
3			상수도사업본부	10.5-10.8
4			아리수홍보관	10.12-10.16
5			서울시 소비재 정보마당	10.19-10.23
6			보육포털서비스	10.19-10.23
7			복지포털	10.19-10.23
8			서울시엠보팅	10.26-10.30
9			시립미술관(영어)	10.26-10.30
10			시립미술관(일어)	10.26-10.30
11			시립미술관(중국-간체)	10.26-10.30
12			시립미술관(중국-번체)	10.26-10.30

붙임  1. 월간업무보고서(9월) 1부.
2. 월간실적보고서(9월) 1부.

3. 주간업무보고서(9월) 5부.  끝.