문서번호	누수방지과-6613
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
노경철		이태형	10/08 강호광
협조	안전총괄과장		조임남
	주무관		성기옥

·

누수복구 완료보고

- 강북구 미아동 303-1번지(미아역 인근)-

2020. 10.

시설관리부

(누수방지과)

누수복구 완료보고

〈상수도사업본부〉

강북구 미아동 303-1번지(미아역 인근) 발생한 불용관 누수 및 복구 현황을 보고 드림.

□ 누수 현황

❍ 위    치 : 강북구 미아동 303-1번지 앞(미아역 인근)

❍ 구경(관종) : D=100㎜(불용관 SP, D=400×100㎜)

❍ 일    시 : 2020. 10. 07.(수) 03:00

❍ 누수원인 : 퇴수관로 파손(불용관)

□ 교통상황 : 소통원활

□ 언론취재 및 보도 : 없음

□ 단수 및 피해 현황 : 없음

□ 누수복구 추진현황

○ 누수접수	: 2020. 10. 07.(수)	03:00
○ 현장출동 및 터파기	:	04:20
○ 지수조치 완료(목침)	:	04:30
○ 되메우기(임시포장복구)	:	07:50
○ 2차 터파기 시행 (라인스토핑 및 누수지점)	:	21:00
○ 라인스토핑 부단수 설치완료	:	23:40
○ 배관작업 중	:	23:40~익일01:30
○ 누수복구 완료	: 2020. 10. 08.(목)	01:30
○ 퇴수 및 통수완료	:	01:30~03:30

□ 유튜브 실시간 스트리밍 운영

○ 운영시간 : ‘20. 10. 07.(수) 22:00~22:30

○ 실시간 공유내용

- 공사 전경, 차량소통 현황

- 안전펜스, 공사안내판, 라바콘, 신호수 등 안전시설 설치 현황

- 누수발생현황 및 복구작업상황

※ 유튜브 방송방 운영자가 실시간으로 음성 설명

○ 방송방 공유자 : 7명

- (본부) 누수방지과장 등 5명

- (북부수도사업소) 급수운영과장, 시설관리과장 등 6명

○ 개설 및 운영 : 북부수도사업소 누수복구담당

□ 행정 사항

○ 야간 근무자에 대한 초과근무 인정

- 근무일시 : ‘20.10.07.(수) 18:00~익일01:30

- 근 무 자 : 누수복구현장(성기옥), 사무실근무(노경철)

· 초과근무 : 4시간(성기옥,노경철)

○ 비상근무자 야간 급식비 지급

- 지급대상자 : 비상대기자(누수방지과직원 등 11명)

▶ 1인 1식 12,000원×11명 = 132,000원

- 근거 : 수계전환 등 비상근무 급식비 관련 예산배정 보고

(배수과-2473(2020.3.5.))

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 강북구 미아동 303-1번지(미아역 부근)

그림설명	위치도
누수발생지점
그림설명		GIS 도면
누수위치 누수발생지점 누수생지점

현 황 사 진

○ 누수위치 : 강북구 미아동 303-1번지(미아역 부근)

누수부위확인	임시지수조치(목침)
누수발생 지점
임시포장복구	라인스토핑 설치완료
누수복구완료	임시포장복구