문서번호	급수운영과-21197
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
강병국		주은선	10/08 변재홍
협 조

준공기한 연기보고

2020. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의거「2020년 양천구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(연간단가)」담당업무 수행중 준공기한 연기사항이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

2020.  10. 8.

보고자 시설6급  성명 강 병 국

1. 공사 현황

가. 작업지시번호 :  시설물보수(양천NO.12,19,20,28,29)

나. 공사 위치 : ****목동공동구외 4개소

다. 준공 기한 :

- 2020. 7. 16 ~ 2020. 9. 30(양천NO.12)

- 2020. 7. 27 ~ 2020. 9. 30(양천NO.19)

- 2020. 7. 27 ~ 2020. 9. 30(양천NO.20)

- 2020. 8. 26 ~ 2020. 9. 30(양천NO.28)

- 2020. 8. 26 ~ 2020. 9. 30(양천NO.29)

2. 보고 내용

- 공사예정 구간에 우천으로인한 작업여건 변경사항 및 민원발생등 현장여건상 당초기한내 공사완료가 불가하여 공사 가능시까지 기간 연장이 필요한 실정임

3. 조치 의견

- 상기와 같이 준공기한내 공사가 불가함에 따라 공사기한을 연기 조치하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

- 귀책사유 및 지체상금 부과여부 : 미부과

- 공사기한 변경

연번	지시 번호	공사기한 변경		비 고
		당 초	변 경
1	시설물보수(양천NO.12)	2020. 7. 16 ~ 2020. 9. 30	2020. 7. 16 ~ 2020. 10. 31
2	시설물보수(양천NO.19)	2020. 7. 27 ~ 2020. 9. 30	2020. 7. 27 ~ 2020. 10. 31
3	시설물보수(양천NO.20)	2020. 7. 27 ~ 2020. 9. 30	2020. 7. 27 ~ 2020. 10. 31
4	시설물보수(양천NO.28)	2020. 8. 26 ~ 2020. 9. 30	2020. 8. 26 ~ 2020. 10. 31
5	시설물보수(양천NO.29)	2020. 8. 26 ~ 2020. 9. 30	2020. 8. 26 ~ 2020. 10. 31

첨부 :  공사연가신청서 1부.   끝.