문서번호	기전과-5734
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이중현		석대창	10/08 변봉섭
협조
	주무관		이태근

『2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』 실정보고에 대한 검토 보고

2020. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』

실정보고에 대한 검토 보고

2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고에 대한 검토 결과를 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

□ 공사위치 : 영등포구 사러가시장 앞 외 4개소

□ 공사내용 : 교통사고 잦은 지점 교통 시설물 개선

○ 신호제어기 신설 및 교체 3대

○ 신호지주 신설 및 교체 15본

○ 신호지주 이설, 통합지주(신호등+가로등) 설치

○ 교통신호등 신설 및 이설, 신호케이블 배관/배선 공종 등

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : ****************

□ 계약기간 : 2020. 6. 23. ~ 2020. 10. 15.

□ 책임감리업체 : *************

Ⅱ		실 정 보 고

□ 주요실정보고

연번	위치 (TGIS명)	변경전	변경후	변경사유	증·감 금액 (천원)
1	신대방삼거리	- 제어기 부분품(LSU) 10EA - 제어기 부분품(Flash) 2EA	- 제어기 부분품(LSU) 9EA - 제어기 부분품(Flash) 1EA	- 현장여건에 맞게 제어기 부분품 물량 반영	▲증 ￦1,101
		- 차량등 이설 4조	- 차량등 이설 2조	- 설계내역에 물량 오류
		- 음향신호기 신설 0대 - 음향신호기 이설 4대	- 음향신호기 신설 2대 - 음향신호기 이설 3대	현장여건에 맞게 실제 사용수량 반영
		- 좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록 포장 0EA	- 좌대, 지주 기초설치 및 철거 소형고압 블록 포장 7EA	원인자 굴착복구허가에 따른 좌대, 지주 기초 설치 및 철거에 대한 보도복구 물량 반영
		- 교통정리요원배치(주간) 5hr	- 교통정리요원배치(주간) 12hr	- 연등구간 2개소 등을 포함하여 안전을 고려해 현장 여건에 맞게 배치
		- 가로등주(10m~12m) 철거 0본 - 가로등암(1등용) 이설 0본 - 가로등암 pipe 신설 0본	- 가로등주(10m~12m) 철거 1본 - 가로등암(1등용) 이설 1본 - 가로등암 pipe 신설 1본	- 가로등 통합지주 설치에 따른 물량 반영
		- 연접처리 및 접지보강 지중1선 0m	- 연접처리 및 접지보강 지중1선 26m	- 가공 조가선의 접지선 물량 추가 반영
2	신한은행관악지점앞 (관악전화국)	- 제어기 부분품(LSU) 0EA	- 제어기 부분품(LSU) 1EA	- D/B변경 및 신호등 추가에 따른 물량 반영	▼감 ￦4,000
		- 제어기 이설 0대 - 지주형좌대 기초설치 0EA - 제어기 지주형좌대(사급) 신설 0EA - 전원선 지중1선 신설 69M	- 제어기 이설 1대 - 지주형좌대 기초설치 1EA - 제어기 지주형좌대(사급) 신설 1EA - 전원선 지중1선 신설 23M	- 한전 TR과 가까운 위치로 제어기 이설에 따른 추가 물량 반영
		- Ø150지주 신설 0본 - 신호케이블 지중1선 신설 85M - 신호케이블 지중2선 신설 37M - 신호케이블 지중3선 신설 19M - 신호케이블 지중5선 신설 5M - 신호케이블 가공2선 신설 0M - 전선관 배관 PE 54mm 1열 63M - 후강전선관 배관(야간) Ø104mm 2열 30M - 아스팔트 횡단굴착(야간) 27M - 소형고압블럭 굴착배관 52M - 신호맨홀 신설 600 3EA - 신호맨홀 신설 800 0EA	- Ø150지주 신설 1본 - 신호케이블 지중1선 신설 98M - 신호케이블 지중2선 신설 0M - 신호케이블 지중3선 신설 0M - 신호케이블 지중5선 신설 8M - 신호케이블 가공2선 신설 35M - 전선관 배관 PE 54mm 1열 35M - 후강전선관 배관(야간) Ø104mm 2열 0M - 아스팔트 횡단굴착(야간) 19M - 소형고압블럭 굴착배관 19M - 신호맨홀 신설 600 2EA - 신호맨홀 신설 800 1EA	굴착심의 불가로 지중화 구간을 가공으로 변경함에 따라 가공지주 추가 및 굴착배관, 전선관, 맨홀 등의 물량 반영
		- 교통정리요원배치(주간) 12hr - 교통정리요원배치(야간) 10hr	- 교통정리요원배치(주간) 20hr - 교통정리요원배치(야간) 0hr	가공 설계 및 제어기 이설에 따른 교통정리요원을 현장여건에 맞게 배치 반영
		연접처리 및 접지보강 지중1선 0m	연접처리 및 접지보강 지중1선 17m	- 가공 조가선의 접지선 물량 추가 반영
		좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 0EA - 보도굴착 포장(가복구) 0M	좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 8EA - 보도굴착 포장(가복구) 17M	좌대, 지주 기초 설치 및 철거, 보도굴착에 대한 가복구 물량 반영
3	국악고교입구삼거리 (AT센터)	- 신호제어기 종합시험 0식	- 신호제어기 종합시험 1식	- 기존 제어기 D/B 변경에 따른 설계 누락 반영	▲증 ￦818
		- 보행신호등(잔여시간포함) 설치 0조	- 보행신호등(잔여시간포함) 설치 2조	- P7,P8 보행등 노후파손에 따른 보행등 교체 추가 반영
		- 교통정리요원배치(주간) 4hr - 교통정리요원배치(야간) 16hr	- 교통정리요원배치(주간) 6hr - 교통정리요원배치(야간) 28h	- 교통정리요원을 현장여건에 맞게 배치 반영
		- 좌대, 지주 기초설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 0EA - 보도굴착 포장(가복구) 0M	- 좌대, 지주 기초설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 10EA - 보도굴착 포장(가복구) 28M	좌대, 지주 기초 설치 및 철거, 보도굴착에 대한 가복구 물량 반영
4	사러가시장앞	- 제어기 부분품(Flash) 2EA	제어기 부분품(Flash) 1EA	- 현장여건에 맞게 제어기 부분품 물량 반영	▼감 ￦18,186
		차량등 (2조동시) 이설 4조 - 지주부착대 9M 철거 1본 - 지주부착대 11M 신설 1본	차량등 (2조동시) 이설 3조 - 지주부착대 9M 철거 0본 - 지주부착대 11M 신설 0본	P9 차량지주의 부착대 9M 1본을 11M로 교체하도록 설계되었으나 부착대 후렌치의 볼트가 풀리지 않아 그대로 존치 하도록 변경
		음향신호기 신설 0대 - 음향신호기 철거 0대	음향신호기 신설 1대 - 음향신호기 철거 1대	P6 차량지주의 음향신호기 고장으로 인한 음향신호기 교체 추가
		- 신호케이블 지중1선 신설 209M - 신호케이블 지중3선 신설 12M - 신호케이블 지중4선 신설 49M - 신호케이블 지중5선 신설 20M - 신호케이블 지중7선 신설 0M - 신호케이블 지중8선 신설 36M - 신호케이블 가공1선 신설 0M - 신호케이블 가공2선 신설 0M - 신호케이블 가공4선 신설 0M - 전선관 배관 PE 54mm 1열 42M - 전선관 배관 PE 100mm 1열 12M - 전선관 배관 PE 100mm 1열 18M - 후강전선관 배관(야간) 104mm2열 72M - 아스팔트 횡단굴착(야간) 58M - 소형고압블럭 굴착배관 77M - 소형고압블럭 굴착배관(야간) 9M - 신호맨홀 신설 800 6EA	- 신호케이블 지중1선 신설 261M - 신호케이블 지중3선 신설 0M - 신호케이블 지중4선 신설 0M - 신호케이블 지중5선 신설 0M - 신호케이블 지중7선 신설 0M - 신호케이블 지중8선 신설 14M - 신호케이블 가공1선 신설 16M - 신호케이블 가공2선 신설 16M - 신호케이블 가공4선 신설 101M - 전선관 배관 PE 54mm 1열 3M - 전선관 배관 PE 100mm 1열 3M - 전선관 배관 PE 100mm 1열 0M - 후강전선관 배관(야간) 104mm2열 0M - 아스팔트 횡단굴착(야간) 0M - 소형고압블럭 굴착배관 6M - 소형고압블럭 굴착배관(야간) 0M - 신호맨홀 신설 800 1EA	지중 굴착 배관을 가공으로 변경하여 굴착배관, 전선관, 맨홀 등의 물량을 변경하여 반영
		- 교통정리요원배치(주간) 14hr - 교통정리요원배치(야간) 28hr	- 교통정리요원배치(주간) 26hr 교통정리요원배치(야간) 0hr	가공 변경으로 인한 교통정리요원을 현장여건에 맞게 배치 반영
		연접처리 및 접지보강 지중1선 0m	연접처리 및 접지보강 지중1선 35m	가공 조가선의 접지선 물량을 추가 반영
		좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 0EA	좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 12EA	좌대, 지주 기초 설치 및 철거에 대한 보도구간 가복구 물량 반영
5	광업진흥공사앞(강남웨딩문화원)	차량등 (1조) 이설 1조 - 보행등 이설 0조 - 차량지주(Ø200) 철거 1본 - 지주부착대 11M 신설 2본 - 지주부착대 9M 신설 0본 - 지주부착대 3M 신설 1본 - 지주부착대 3M 철거 1본 - 신호케이블 지중1선 신설 113M - 신호케이블 지중3선 신설 22M - 신호케이블 지중4선 신설 21M - 신호케이블 지중6선 신설 0M - 가로등암(2등용) 이설 0본	차량등 (1조) 이설 2조 - 보행등 이설 2조 - 차량지주(Ø200) 철거 2본 - 지주부착대 11M 신설 1본 - 지주부착대 9M 신설 1본 - 지주부착대 3M 신설 2본 - 지주부착대 3M 철거 2본 - 신호케이블 지중1선 신설 60M - 신호케이블 지중3선 신설 55M - 신호케이블 지중4선 신설 0M - 신호케이블 지중6선 신설 26M - 가로등암(2등용) 이설 2본	- P6 차량지주 기초 설치 위치가 화단 조성으로 기초 설치가 어려워 P4 차량지주를 양날개 지주로 변경 반영	▲증 ￦5,931
			음향신호기 신설 3대 - 음향신호기 이설 0대 - 음향신호기 철거 3대
		음향신호기 신설 0대 - 음향신호기 이설 1대 - 음향신호기 철거 0대		P3,P4,P5 지주의 음향신호기 고장으로 인한 음향신호기 교체 추가
		좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 0EA	좌대, 지주 기초 설치 및 철거 소형고압 블록포장(가복구) 5EA	좌대, 지주 기초 설치 및 철거에 대한 보도구간 가복구 물량 반영

□ 변경금액(예상)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액	비 고
도급비	공 급 가 액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	**********
	합 계	***********	***********	***********

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 2020년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사와 관련, 현장여건을 반영하여 실제 시공물량의 변경이 필요하다고 판단됨.

※ ****************************************

Ⅲ		보 고 자 의 견

□ 실정보고에 대한 검토 결과

○ 굴착 불가(신한은행 관악지점, 사러가시장) 등에 따른 물량변경 사항을 현장에 맞게 변경하는 것이 타당하므로 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고에 대해 승인 하고자 함.

※ 위 사항에 대하여 추후 설계변경에 반영 예정.

붙임 : 책임감리원 실정보고서 1부.  끝.