코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	예산담당관
(경유)
제목	'21년 예산 추가 요청(북부권역 도시농업복합공간 조성사업 사업비 증액)

1. 중랑구 일자리창출과-29023(’20. 8. 24)호와 관련입니다.

2. 북부권역 도시농업복합공간 조성사업 추진 중 아래와 같은 사항으로 사업비 증액요청이 있어 통보하오니 원활한 사업추진을 위해 ’21년 예산반영 토록 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 사업변경 내역

구 분	변 경 전 [사업 신청시(‘19.10)]	변 경 후 (‘20.8)	변동내역	비고
위 치	신내동 산 2-45일대	신내동 256-1
규 모	450㎡(총17,608㎡) 1층(지하 2층, 지상 4층)	746㎡ (지상 3층)	296㎡(증가)
소요예산	1,800백만원 (시 15,000, 구 300)	2,727만원	927만원 증가 (시비요청)

※ 당초 중랑문화예술회관 내 1개 층을 활용 할 계획이였으나, 문화예술회관건립 취소에 따라 복합공간 효용성 저하 등으로 부득이 부지 위치 변경

○ 예산증액 사유

- 당초 중랑문화예술회관 건립시 총 사업비 36,216백만원에서 복합공간 조성사업비 1,800백만원을 분담하도록 하였으나, 중랑문화예술회관 건립 취소로 신규 조성부지(경사지) 토공사 및 단독 건축에 따른 공유공간(다목적실, 강당, 회의실 등) 반영으로 건축면적 증가 등 발생

○ ’21년 예산 요구(안)

						(단위 : 백만원)
통계목	’20 본예산 (A)		’21 한도액 (B)	’21 요구액 (C)	증감 (C-B)	산출내역	증감사유 및 특이사항
소 계	1,500		1,200	927	927
자치단체 자본보조	1,500			927	927	복합공간 건축비 증가분 927,000천원	대상지 현황상(경사지) 토공사비 및 연면적 증가로 인한 건축공사비 등 증액

붙임 : ’21년 예산 추가요청서 1부.  끝.

	도시농업과장
실무사무관	정삼식		도시농업지원팀장	주성호		도시농업과장	10/08 김광덕
협조자
시행	도시농업과-15565	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 서소문로124 시티스퀘어 18층	/
전화	02-2133-5405	/전송	02-768-8945	/	jeangss@seoul.go.kr	/	부분공개(6)