문서번호	광화문광장추진단-11357
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광장계획팀장	광화문광장사업반장
황서현	이강수	10/07 임창수

「새로운 광화문광장 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역」

준공기한 연기 보고

2019. 10.

도시재생실

광화문광장추진단

「새로운 광화문광장에 따른 소규모환경영향평가 용역」

준공기한 연기 보고

세종로 일대 「새로운 광화문광장 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역」을 아래와 같이 준공기한 연장하고자 보고드림

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 새로운 광화문광장조성에 따른 소규모환경영향평가 용역

○ 용역기간 : ’19. 4. 17. ~ ’19. 10. 18.

○ **********************************

○ 계 약 자 : (주)대영이이씨

○ 과업내용 : 광화문광장 일대 소규모환경영향평가 실시 및 관련 절차 이행

□ 추진경위

○ ’19. 3. 8	소규모환경영향평가 추진계획 수립

○ ’19. 3.21	소규모환경영향평가 용역계약 의뢰

○ ’19. 4.17	소규모환경영향평가 용역계약 체결 및 과업수행

○ ’19. 5~9	평가서 작성을 위한 사전 조사 실시

□ 검토내용

○ 설계변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	*************	*************	변경없음
계약기간	2019. 4. 17. ~ 2019. 10. 18.	2019. 4. 17. ~ 2020. 4. 18.	6개월 연장

******

******************************************************************************

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ’19. 10.	용역준공기한 의뢰(광화문광장추진단→재무과)

○ ’20. 01.~	소규모환경영향평가(본안) 작성 및 협의

붙임   1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.