“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

1. 광화문광장추진단-11357호(2019.10.7.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행하고 있는 「새로운 광화문광장 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역」에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역

나. 계약금액 : ****************************

다. 용역기간 : 2019.4.17. ~ 2019.10.18

라. 계약업체 : ㈜대영이이씨

마. ****************************************************************************************

바. 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	*************	*************	변경없음
계약기간	2019.4.17. ~ 2019.10.18.	2019.4.17. ~ 2020.4.18.	6개월 연장

붙임	1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	광화문광장추진단장
주무관	황서현		광장계획팀장	이강수		광화문광장사업반장	10/08 임창수
협조자
시행	광화문광장추진단-11420	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩9층	/
전화	02-2133-2030	/전송	02-2133-1080	/	spinosus@seoul.go.kr	/	부분공개(5)