문서번호	전산정보과-10666
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
김지영		신경숙	10/12 장화영
협조
	주무관		박영미

「디지털 서울 워터 플랫폼 구축 사업」

월간 보고서(9월)

2020. 10.

상수도사업본부

(전산정보과)

「디지털 서울 워터 플랫폼 구축 사업」

월간 보고서(9월)

□ 사 업 명 : 디지털 서울 워터 플랫폼 구축

□ 사업기간 : 2020년 9월 ~ 12월(4개월)

□ 사 업 비 : *********

□ 계약방법 : 수의계약(공고 유찰에 따라 단독 응찰한 업체에 대해 제안서평가위원회에서 적격심사 후 수의계약 체결)

□ 사업내용

• 상수도 데이터를 통합, 실시간, 시각화 하는 시스템 개발

• 플랫폼 구축 : 가상화서버, DID 디스플레이, SW 등 납품・설치

Ⅰ		9월중 추진 현황

□ 계약체결 : 2020. 9. 1.

□ 용역업체 보안교육 실시 : 2020. 9. 10.

○ 교육대상 : ㈜와이디엔에스 김인환 외 9명

○ 교육내용 : 용역수행시 업체가 준수해야 할 정보보안 관련 사항

(비밀유지 의무 준수, 누출금지 대상정보・위반시 처벌내용, 정보보안 인식 제고 등)

□ 사업팀 사업환경 구축 : 2020. 9. 22.

□ 서버, DID, 시스템 SW 발주관련 자료조사

○ 본부장실 실측 및 인테리어 설계

○ 클라우드센터 서버 입주신청 관련 자료작성

- 가상화 서버 자원할당 신청(CPU, 메모리, 디스크 할당 등)

- 물리서버, 가상화 SW 입주신청서

※ 이슈사항 : DB서버 미정

□ 사업관리 및 자료조사

○ 명시과업의 상세 요구사항 정리

○ 내부 보고용 주요화면 시안 작성

○ 담당자 인터뷰 일정 계획 작성

○ 착수보고 자료 작성

○ 내부시스템별 핵심 데이터 조사 및 데이터 조사서 작업범위 검토

□  사업 착수보고회 개최

○ 일    시 : 2020. 9. 25.(금) 15:00

○ 장    소 : 본부 2층 회의실

○ 참 석 자 : 부본부장, 각부장(5), 과장 등

○ 회의내용 : 사업 추진 방향 및 계획 보고, 참석자 질의응답 등

Ⅱ		9월중 투입인력 현황

구분	성명	투입공수(M/M)		비고
		금월	누적
ＰＭ	김인환	1	1	프로젝트 총괄 진행, 상주
자료분석	원종훈	0.5	0.5
자료수집/적재	유승수	0.6	0.6	추가투입, 상주
기획/디자인	송재섭	0.5	0.5
개발	윤지현	1	1
	정상헌	-	-
	오상현	0.5	0.5
	문재필	-	-
	노봉균	0.3	0.3	추가투입, 상주
	이진수	-	-	추가투입, 안정화
합계		4.4	4.4

Ⅲ		사업추진 진행현황

[단위 : 진행율(%)]

구 분	계 획	실 적	계획대비 진도율	비고
사업관리	****	****	100.0
자료조사・수집	****	**	52.6
개발	****	****	120.0
전 체	****	****	90.9

Ⅳ		10월 추진계획

□ 자료조사 및 수집

○ 부서별/분야별 담당자 인터뷰 실시

○ 16개 내부시스템 연계대상 선정

○ 서울시 디지털시민시장실 연계요청

□ 인프라 구축

○ 클라우드센터에 서버, S/W입주 : 10월말 예정

○ 본부장실 DID 장비 설치

□ 시스템 개발개발

○ 클라우드센터 개발・운영서버 설정

○ 서울시 디지털시민시장실 재난정보 적재

○ 화면 UI/UX설계

○ 공간정보 적용 소스 개발

○ GRIP 플랫폼 관리 시스템 오픈

붙임 : 1. 주간업무 추진현황 보고서 5부.

2. 월간업무 추진현황 보고서(9월) 1부.   끝.