문서번호	조경과-13189
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
안혜연	代최형순	10/12 문길동

-2020년 동네숲(골목길) 가꾸기 사업-

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(관악구)

2020.10.

푸른도시국

(조 경 과)

-2020년 동네숲(골목길) 가꾸기 사업-

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(관악구)

2020년 동네숲(골목길) 가꾸기 사업 관련 보조사업자의 예산 집행계획 변경에 대해 자치구로부터 변경 승인 요청이 있어 검토 보고드림.

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 함께 가꾸는 꽃피는 정원

○ 보조사업자  : 관악산과도림천환경지킴이

○ 협약 자치구 : 관악구 공원녹지과

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 11.

○ 대 상 지 : 호암로498 신우초등 앞 외 7개소

○ 사업내용 : 플랜트박스 정원 조성, 도시녹화 교육 및 정원답사

○ 사 업 비 : 100,000천원

▢ 변경사항

○ 보조금 비목간 집행계획 변경(물품비→시설공사비)

○ 변경사유

- 수요증가로 인한 플랜트박스 제작비용 증가 및 화훼구매·인건비 감액

○ 세부 변경 내역

비 목	세부항목	보 조 금(천원)			변경사유
		변경 전	변경 후	증 감
계		70,000	70,000	-
시설공사비	시설공사비	38,970	40,900	증1,930	수요증가로 플랜트박스 제작비용 증가
물품비	물품구입·제조비·전문인건비	31,030	29,100	감1,930	화훼구매 및 인건비 감액

○ 자치구 검토결과

- 원활한 사업 추진을 위해 금액 조정이 필요한 사항으로 보임.

▢ 검토결과

○ 플랜트박스 수요 증가로 인해 물품비를 절감해 시설공사비로 변경하는 사항으로, 원활한 사업진행을 위해 비목간 집행계획 변경 승인함.

▢ 향후계획

○ 검토결과 및 변경승인 통보(시→관악구)

붙임  자치구 공문 1부.  끝.