문서번호	시설보수과-3576
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행		10/12 한성현
협 조

불광천/홍체천 차집관로(사각) 보수공사 추가보수 계획 보고

2020. 10

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

불광천/홍제천 차집관로(사각) 보수공사 추가 보수 계획 보고

□ 홍제천 및 불광천 차집관로(사각) 보수공사 건의 잔여물량 1,349m중 금년 내 준공 가능한 285m에 대하여 추가 보수공사를 시행하여 차집관로 보수 및 관리에 만전을 기하고자 함

1. 추진근거

- 난지수계 차집관로 내부조사 용역 최종 결과 보고(시설보수과-2793, 17.7.27)

2. 사업개요

1) 공 사 명 : 2020년 불광천/홍제천 차집관로(사각) 보수공사

2) 사 업 비 : 2,530백만원

3) 사업기간 : 2020. 06. 22 ~ 2020. 12. 23

4) 공사내용 : 홍제천 및 불광천 차집관로(사각) 보수

5) 공사규모

- 차집관거 단면보수 807m(불광천 326m, 홍제천 481m)

6) 도급사 :  현대홈씨티 김정수

7)추진경위 :

- 1월~2월 : 대상구간 조사 및 설계

- 3.10 : 특정기술 선정심의, 4.16 : 계약심사 요청

- 5.11 : 일상감사 요청, 5.19 : 계약의뢰, 6.22: 계약체결

- 5.15~10.15 : 하천 수방기간으로 공사중지

3. 추가보수 구간 추진 계획

가. 추가보수 배경

- ’20년 신규사업인 “불광천/홍제천 차집관로 물막이 및 정밀안전진단” 사업비가 20억원이며, 보수대상 물량을 물막이 상태에서 보수하지 않고 내년에 보수공사를 시행 할 경우 고액의 물막이 공사비가 다시 소요되는 문제점이 발견됨

- 이와 같은 문제 해결을 위해 금년 “불광천/홍제천 차집관로 보수공사” 사업비 50억원 중 금년 내 준공 가능한 30억원만 집행하였으며,

- 나머지 20억원은 ’20년 신규사업 “불광천/홍제천 차집관로 물막이 및 정밀안전진단”에서 발생된 물량을 물막이 상태에서 보수공사 하는데  사용하기 위해 남겨 두었음

- 사업 추진과정에서 “불광천/홍제천 차집관로 물막이 및 정밀안전진단” 사업 지연으로 당초 남겨둔 20억원 지출이 어렵고, 본 사업비 20억원 중 낙찰차액 8억원이 발생하여 다른 사업비 지원없이 자체 예산으로 보수공사 가능하게 되었음.

- 반면, “불광천/홍제천 차집관로 보수공사”는 사업이 정상적으로 진행되어 년내 285m(공사비 980백만원) 정도 집행이 가능하게 되었음

- 따라서, 당초 집행 보류했던 “불광천/홍제천 차집관거 보수공사” 사업비 20억원 중 금년 내 완료 가능한 약 980백만원을 별도 발주없이 설계변경 방식으로 추가 집행하여 차집관거 보수 및 관리에 만전을 기하고자 함

나. 차집관거 보수실적 및 잔여 물량

하천명	합계	2017	2018	2019	2020	잔여물량
합계	6,210	1,546	1,070	1,405	807	1,349
불광천	3,293	1,341	460	614	326	553
홍제천	2,916	205	610	791	481	796

다. 추가보수 계획

- 추가 보수구간 : 285m(HJR2-092 : 177m, HJR2-093 : 108m)

- 추가보수 구간 위치도

4. 향후계획(안)

가. 2020. 10월 중 : 서울시설관리 공단에 추가 보수 요청

나. 2020. 10월~ 12월 : 설계변경 및 공사시행.  끝.