문서번호	기전과-5823
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이중현		석대창	10/13 변봉섭
협조	주무관		이태근
	주무관		양상규

『2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』 설 계 변 경 검 토 보 고

2020. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』

설 계 변 경  검 토 보 고

2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 설계변경 사항에 대한 검토 결과를 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

□ 공사위치 : 영등포구 사러가시장 앞 외 4개소

□ 공사내용 : 교통사고 잦은 지점 교통 시설물 개선

○ 신호제어기 신설 및 교체 3대

○ 신호지주 신설 및 교체 15본

○ 신호지주 이설, 통합지주(신호등+가로등) 설치

○ 교통신호등 신설 및 이설, 신호케이블 배관/배선 공종 등

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : ****************

□ 계약기간 : 2020. 6. 23. ~ 2020. 10. 15.

□ 책임감리업체 : *************

Ⅱ		설계변경사항

□ 주요 설계변경 내용

순번	공종	구분	단위	수량			변경사유	증·감(원)
				당초	변경	증·감
1	제어기부분품 EXT Flash	신설	EA	2	1	-1	현장 여건에 맞게 공사 물량 변경.	*********
2	제어기완성품	재설치	대	0	1	+1
3	지주형좌대 기초설치(600mm)	신설	대	0	1	+1
4	제어기 지주형좌대(사급) 지주형(용융)	신설	대	0	1	+1
5	잔여시간표시기 설치 숫자형(사급)	신설	조	10	8	-2	보행등 노후 파손에 따른 물량 변경.	*********
6	보행신호등 및 잔여시간표시기 설치 1면2색/숫자형(사급) 각1조	신설	조	0	2	+2
7	차량신호등 LED1면2,3,4색 1조	이설	조	7	6	-1	현장 여건에 맞게 공사 물량 변경.	***********
8	차량신호등 LED1면2,3,4색 2조동시	이설	조	6	5	-1
9	보행등 이설 LED1면2,3색 1조	이설	조	14	15	+1
10	보행,잔여시간,보조등	철거	조	4	6	+2
11	시각장애인용 음향신호기 본체(사급)	신설	대	1	9	+8	음향신호기 고장에 따른 물량 변경	***********
12	시각장애인용 음향신호기 본체(공통)	이설	대	14	11	-3
13	시각장애인용 음향신호기 본체(공통)	철거	대	0	7	+7
14	음향신호기 압버턴(사급),브라켓형	신설	EA	1	9	+8
15	음향신호기 압버턴(공통)	이설	EA	14	11	-3
16	음향신호기 압버턴(공통)	철거	EA	0	7	+7
17	교통신호등지주 신설(관급) Ø300㎜×8M	신설	본	1	0	-1	※ 기전과-5345(2020. 9. 21.)호와 관련하여 설계도서와 현장 상황의 상이한 부분을 현장 여건에 맞게 공사 물량 변경.	***********
18	교통신호등지주 신설(관급) Ø250㎜×8M	신설	본	4	5	+1
19	교통신호등지주 신설(관급) Ø200㎜×8M	신설	본	3	4	+1
20	교통신호등지주 신설(관급) Ø150㎜×8M	신설	본	0	1	+1
21	교통신호등지주 신설(관급) Ø125㎜×6M	신설	본	0	1	+1
22	교통신호등지주 신설(관급) Ø125㎜×4M	신설	본	4	2	-2
23	교통신호등지주 철거 Ø200㎜×8M	철거	본	4	7	+3
24	교통신호등지주 철거 Ø150㎜×8M	철거	본	7	10	+3
25	교통신호등지주 철거 Ø125㎜×6M	철거	본	0	1	+1
26	지주부착대 설치(관급) 13M	신설	본	2	1	-1
27	지주부착대 설치(관급) 11M	신설	본	5	2	-3
28	지주부착대 설치(관급) 9M	신설	본	1	3	+2
29	지주부착대 설치(관급) 7M	신설	본	4	5	+1
30	지주부착대 설치(관급) 3M	신설	본	1	2	+1
31	지주부착대 철거 9M	철거	본	3	2	-1
32	지주부착대 철거 9M	철거	본	1	2	+1
33	지주기초 및 앙카 Ø300㎜ 기본	신설	조	1	0	-1
34	지주기초 및 앙카 Ø250㎜(1.7x1.7x1.0)	신설	조	0	1	+1
35	지주기초 및 앙카 Ø200㎜ 기본	신설	조	3	4	+1
36	지주기초 및 앙카 Ø150㎜ 기본	신설	조	1	2	+1
37	지주기초 및 앙카 Ø125㎜ 기본	신설	조	5	4	-1
38	신호케이블(F-CVV,1.5SQ/5C)	신설	M	2112	2224	+112
39	전원선	신설	M	104	57	-47
40	전선관 배관 PE Ø54㎜ 1열	신설	M	149	69	-80	굴착심의허가 불허 구간의 가공 설계 변경에 따른 물량 변경	************
41	전선관 배관 PE Ø100㎜ 1열	신설	M	38	31	-7
42	전선관 배관 PE Ø100㎜ 2열	신설	M	21	0	-21
43	후강전선관 배관(야간) Ø104㎜ 2열	신설	M	188	86	-102
44	아스팔트 횡단굴착(야간)	신설	M	157	72	-85
45	나팔구 굴착	신설	M	0	5	+5
46	소형고압블럭 굴착배관	신설	M	170	51	-119
47	소형고압블럭 굴착배관(야간)	신설	M	12	0	-12
48	스톤블록 굴착	신설	M	0	7	+7
49	일반토사(사리도) 굴착배관	신설	M	57	51	-6
50	경고테이프 설치	신설	M	394	186	-208
51	주물프레임 신호맨홀 600x600x800	신설	EA	8	4	-4
52	지주형 좌대기초 설치 블록 포장	신설	EA	0	1	+1	원인자 굴착복구 허가에 따른 복구물량 반영	*********
53	콘크리트 좌대기초 철거 블록 포장	신설	EA	0	1	+1
54	지주(Ø250㎜) 기초설치 블록 포장	신설	EA	0	3	+3
55	지주(Ø250㎜) 기초철거 블록 포장	신설	EA	0	2	+2
56	지주(Ø200㎜) 기초설치 블록 포장	신설	EA	0	2	+2
57	지주(Ø200㎜) 기초철거 블록 포장	신설	EA	0	2	+2
58	지주(Ø150㎜) 기초설치 블록 포장	신설	EA	0	1	+1
59	교통정리요원배치(주간) 전체소등시	신설	hr	9	30	+21	굴착심의허가 불가에 따른 주·야간 교통정리요원 배치 시간 조정	*********
60	교통정리요원배치(야간) 전체소등시	신설	hr	4	0	-4
61	교통정리요원배치(주간) 부분소등시	신설	hr	72	80	+8
62	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(야간)	신설	hr	50	28	-22
63	가로등주 10M – 12M	철거	본	4	2	-2	현장 여건에 맞춰 가로등주 통합 설치 물량 변경	***********
64	가로등암(1등용)	이설	본	0	1	+1
65	가로등암(2등용)	이설	본	4	3	-1
66	연접처리 및 접지보강 지중1선	신설	M	0	78	+78
67	가로등암 Pipe	신설	본	4	1	-3
68	지주형 좌대기초 설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2	보도굴착구간 가복구 물량 반영	*********
69	지주형 좌대기초 철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	1	+1
70	지주(Ø350㎜) 기초설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
71	지주(Ø250㎜) 기초설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
72	지주(Ø250㎜) 기초철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
73	지주(Ø200㎜) 기초설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
74	지주(Ø200㎜) 기초철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	4	+4
75	지주(Ø150㎜) 기초철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	4	+4
76	지주(Ø125㎜) 기초설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	1	+1
77	지주(Ø125㎜) 기초철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
78	맨홀(600㎜) 설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
79	맨홀(600㎜) 철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	3	+3
80	맨홀(800㎜) 설치 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	2	+2
81	맨홀(800㎜) 철거 블록 포장(가복구)	신설	EA	0	1	+1
82	굴착(B=0.6)복구 블록 포장(가복구)	신설	m	0	45	+45

□ 보험료 및 기타 제경비 정산

No	구 분	현 재 상 황	대 책	공사금액변경
1	건강보험료,연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금	납부 증빙자료 미제출	감액	**************
2	산업안전보건관리비	공사 재료비 및 노무비 변경으로 인한 금액 변경	증빙자료 제출에 의한 정산	*************
3	이전비(음향신호기 기능검사비,폐기물 처리비 등)	해당비용 발생	비용 반영	*************
4	간접비 (기타경비, 일반관리비, 이윤 등)	위 항목의 금액변경으로 인한 비용 변경	비용 반영	**************

□ 설계변경금액

구 분		변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액	비 고
도급비	공 급 가 액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	**********
	합 계	***********	***********	***********

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 실정보고 승인사항을 반영, 현장여건에 따른 공사물량의 증·감 차이가 발생하여 설계변경이 필요함.

※ ******************************************

Ⅲ		보 고 자 의 견

□ 설계변경 요청에 대한 검토 결과

○ 굴착 불가에 따른 가공설계, 음향신호기 고장부위 신설 및 현장여건 고려 등에 따른 물량 증·감 변경사항으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당하다고 판단돼 이를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2020. 10. 14. : 설계변경 시행(기전과→관리단속과)

□ 2020. 10. 15. : 공사준공

붙임 : 1. 책임감리원 실정보고서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부
3. 설계변경 원가검증확인서 1부.
4. 실정보고에 대한 검토보고 1부.  끝.