투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	과징금부과심의위원회 상정안건 수정 제출-남부순환로 개봉역 앞 구조개선공사

1. 토목부-19011호(2020. 9.29)와 관련입니다.

2. 위 대호로 과징금부과심의위원회 안건상정을 요청한 바 있으나 과징금 부과금액에 대해 정정사항이 발생되어 수정제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수정내용

구 분		계약금액	부과금액	과징금 부과율	비고
㈜케이에스씨건설	당초	47,683,504,000원	143,050,510원	0.5%	공동도급비율60%
대우조선해양(주)			95,367,010원	0.5%	공동도급비율40%
㈜케이에스씨건설	변경	35,490,504,000원	106,471,520원 (감36,578,990원)	0.5%	공동도급비율60%
대우조선해양(주)			70,981,000원 (감24,386,010원)	0.5%	공동도급비율40%

나. 수정사유

피선정인은 본사업의 당초 수급자가 법정관리에 따른 공사 타절이후 보증회사로 이 사업에 참여('10.06월)를 하였고 타절금액을 제외한 계약금액을 기준으로 과징금부과금액을 산정하는 것이 적절하다는 요청에 따라 내용검토 결과 그 요청사항이 타당하다는 판단에 따라 부과금액을 정정하고자 함.

다. 계약금액 조정내역

총 계약금액	타절금액	과징금 부과 산정계약금액	비고
47,683,504,000원	12,193,000,000원	35,490,504,000원

붙임 1. 과징금 부과 심의신청서(변경) 각 1부

2. 추진현황정리 1부.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							조동협			광역도로과장					박일연					토목부장					10/13 김용제
협조자
시행			토목부-19606									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2586						/전송			02-3708-2599					/	yerom@seoul.go.kr												/	부분공개(5)