문서번호	박물관과-11064
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	한식문화공간조성추진반장	박물관과장	문화시설추진단장		문화본부장
남광연	이병두	이성은	한병용		10/13 유연식
협 조	주무관			김소연
	주무관			유희정

삼청각 리모델링 사업 변경계획

2020. 10

문 화 본 부

(박물관과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■	제5호

삼청각 리모델링 사업 변경계획

문화시설로서 효율적 사용과 다양한 문화 행사개최를 위하여 우리본부에서 추진중인 『삼청각 리모델링 사업』을 효율적으로 추진하기 위하여 사업 계획을 변경하여 추진하고자 함

.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사 업 개 요

○ 사 업 명 : 삼청각 리모델링 사업

○ 사업기간 : ‘19. 10.~ ’21. 7.

○ 총사업비 : ********************************************

○ 위    치 : 성북구 대사관로 3 외3필지(부지면적 20,115㎡)

○ 규    모 : 7개동, 지하2/지상2층, 연면적 4,399㎡

구분	동별	면적(㎡)	주용도(안)	비고
별채	유하정	203.04	한식 디저트 카페
	청천당	173.56	고급연회장
	천추당	284.26	기획전시, 연회장
	동백헌	172.90	한식체험공간 (궁중,반가 요리체험)
	취한당	168.86
	[ 소 계 ]	1002.6
본채	일화당	3,234.64	공연장, 한식당, 다원
	보일러 변전실	161.78	기계실
	[ 소 계 ]	3,396.42
[ 총 계 ]		4,399.04

【 시설 위치도 】	【 조감도 】

Ⅱ		추진 개요

□ 추진근거

○ 삼청각 운영활성화 기본계획안 (시장방침 제110호, ‘16. 4. 22.)

○ 삼청각 ‘한국음식문화의 공간’ 사업개선안 (행정1부시장방침 제162호, ‘17. 5. 30.)

○ 삼청각 리모델링 계획 (박물관과-6834, ‘17. 6. 21.)

○ 삼청각 리모델링 추진계획 (박물관과-11077, ‘19. 10. 2.)

○ 삼청각 리모델링 설계용역 변경계획 (박물관과-5817, ‘20. 5. 19.)

□ 추진방향

○ 노후된 기존 시설 보수를 통한 문화시설로서의 활용도 제고

- 삼청각 정밀안전진단(’17. 5월 시행) 결과에 따른 보수보강 공사 시행

- 노후 시설 보수 및 조경정비를 통한 시민 안전 및 직원 근로환경 개선

○ 문화시설로서의 효율적 사용 및 다양한 문화 행사개최 기반 마련

- 본채(일화당)   : 한식당, 연회, 공연 등 식음문화공간 개선

- 별채(천추당 등): 공간별 맞춤 설계로 각 별채별 활용도 제고

□ 추진경위

○	’16. 4. 22.	:	삼청각 운영활성화 기본계획 수립(시장방침 제110호)
○	’17. 3.~ 5.	:	삼청각 정밀안전진단(한국종합안전(주), 결과:B등급, 양호)
○	’17. 6. 21.		삼청각 리모델링 계획 수립
○	’17.7.~12.	:	운영방안 재검토 및 전문가 자문‧회의(15회)
○	’18.11.~’19. 7.	:	삼청각 경영 컨설팅 및 리모델링 지침 마련 용역
○	’19. 10. 2.	:	삼청각 리모델링 추진계획
○	’19.10.	:	삼청각 리모델링 설계용역 착수
○	’20. 5. 19.	:	삼청각 리모델링 설계용역 변경계획
○	’20. 9. 28.	:	삼청각 리모델링 설계용역 준공
○	’20. 10.	:	삼청각 별채 리모델링 공사 착공(예정)

Ⅲ		세부 추진 계획

□ 단계별 추진계획

① 1단계(~2021. 2.): 별채 리모델링 공사 ※ 공사 발주 완료

*****************************************************

*************************************************

②  2단계(~2021. 7.): 본채 및 조경 정비 공사 ※ 금회시행

***********************************************************

*****************************************************

□ 공간 활용 계획(안)

구 분		용 도	세부내용
별 채	유하정	한식 디저트 카페	한식 디저트, 기념품 등 전시 판매
	청천당	고급 연회장	시민, 관광객 등을 위한 연회 등
	천추당	기획전시, 연회장	기획전시가 가능한가능한 연회장
	동백헌·취한당	한식체험공간	전통 궁중․반가음식 체험
일화당	지상 2층	공연장, 다원	공연, 연회, 전통차 체험공간
	지상 1층	한식당	한식당

Ⅳ		2단계 사업 시행계획

□ 본채(일화당) 및 시설 보수 공사

○ 공사 내용

- 일화당 지상2층 바닥 누수 보수 및 내부 노후공간 보수*************

□ 2층 외부 바닥 방수 및 데크 교체, 출입구·홀 등 내부 인테리어 보수 공사

- 정밀안전진단 보고서 결과(’17.3월 시행)에 따른 본채 및 시설 보수·보강 공사

	[삼청각 정밀안전 진단 결과]
- 진단결과: 철근 콘크리트조(일화당 등) “B”등급 / 목구조(한옥 별채) “양호” □보조부재에 경미한 결함 발생, 기능 발휘 지장 없음 → 내구성 증진을 위한 부분 보수·보강 필요 - 보수·보강 공사 : 구조보강, 마감 박리 및 균열 보수, 기와보수, 외부 도장 등 □산출공사비: 1,257백만원(정밀안전진단 업체 보수보강공사 산출금액)
기와 파손		난간 열화		도장 박리	외벽 균열

○ 소요 예산 : 1,611백만원 ****************

**************************************************************

*******************************************************************

********************************************************

*********************************************************************

*************************************************

○ 추진 방법

- 설계(’20.10.~’21.1.) : 현장 실측을 통한 적정 보수 공법 선정 및 실시설계를 하기 위한 한옥설계 전문 건축사와 설계용역 추진

***************************************************************

- 공사(’21.2.~7.) : 제한경쟁입찰(지역제한, 종합건설업)

□ 조경 정비 공사

○ 공사 내용 : 삼청각 수목 및 조경시설 정비

- 삼청각 부지(20,115㎡) 내 수목 정비(수목전지, 구조보강, 이식, 잡목 제거 등)

수목 가지 정리, 수형 다듬기 등을 통한 식생 정비 작업

수평으로 휘는 수목의 움직임을 제한하여 수목을 보호하기 위해 설치하는 보강 장치(지지대, 당김줄 등)

- 산책로, 계단 조경시설 파손 부분 정비 및 장애인 동선을 고려한 산책로 정비

- 별채 리모델링과 연계하여 별채 주변 조경 정비 및 개방감 확보

○ 소요 예산 : 394백만원

**********************************************************

************************************************************

***************************

*********************************************************

○ 추진 방법

- 설계(’20.10.~’21.1.) : 조경설계사무소(조경 엔지니어링 등록사업자)와 설계 추진

*****************************************************************************************

- 공사(’21.2.~4.) : 제한경쟁입찰(지역제한, 조경공사업)

Ⅴ		행정 사항

□ 부서별 협조사항

○ 기술용역타당성심사     : 기술심사담당관

○ 공공건축 설계자 추천   : 도시공간개선단

○ 설계 및 공사 감독      : 박물관과

○ 공간 구성 및 운영 계획 : 세종문화회관

□ 예산사항

○ 소요예산: 3,885백만원[3,096백만원(‘20년예산)+789백만원(’19년 이월예산)]

○ 예산과목: 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 삼청각 리모델링, 시설비(401-01)

Ⅵ		향후 계획

○ 별채 리모델링 공사 시행(1단계)    : ’20. 10. ~  ’21. 2.

○ 기술용역타당성심사 및 발주(2단계) : ’20. 10.

○ 본채 및 조경 설계용역 시행       : ’20. 11. ~  ’21. 1.

○ 본채 및 조경 공사 시행            :  ’21. 2. ~ 7.(조경공사: ~’21. 4.)

○ 삼청각 개관                      :  ’21. 8.  끝.

붙 임	삼청각 본채 및 시설 보수공사 계획

일화당	2층

*****************************************************************************************************

일화당	외부
- 주요 보수·보강공사: 지붕 기와교체, 외부 마감 보수, 일부 구조재 보강

*********************************