문서번호	계약심사과-17796
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목심사2팀장	계약심사과장		재무국장
조성도	노형근	김수정		10/15 이병한
협 조

밤섬생태관찰데크 조성사업 기본 및 실시설계 설계 경제성 심사(VE) 결과보고

2019. 10.

재 무 국

[계약심사과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	시설물 안전관리 검토
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

밤섬생태관찰데크 조성사업 기본 및 실시설계

설계 경제성 심사(VE) 결과 보고

한강사업본부 공원사업과 시행「밤섬생태관찰데크 조성사업 기본 및 실시설계」에 대한 설계 경제성 심사(VE) 결과를 보고 드림

1		심사 요청 개요

□ 신청 부서 및 일자 : 한강사업본부 공원사업과(‘18. 11. 23.)

□ 사업 내용

ㅇ 사 업 명 : 밤섬생태관찰데크 조성사업 기본 및 실시설계

ㅇ 위    치 : 마포구 토정로56(당인리 발전소앞 수면)

ㅇ 사업 내용: 관찰데크,수상택시승강장, 보행연결로 조성

- 관찰데크: 1F(폭5m,길이220m,높이220m)/2F(폭4m,길이24.6m,높이2.85m)

- 수상택시승강장: 폭6.7m,길이5m,높이2.85m

- 보행연결로:-1(폭3m,길이150m,높이2.85m)/보행연결로-2(폭4m,길이180m)

ㅇ 공 사 비 : 11,738백만원

ㅇ 용역기간 : ’17. 8. 2. ~ ’18. 12. 21.

ㅇ 설계공정률 : 92%

2		심사 개요

□ 심 사 자 : 11명(외부전문가 7, 내부공무원 4)   * 세부내용 별첨

□ 기   간 : ’19. 8. 29. ～ ’19. 9. 6.(기간 중 3일)

□ 장    소 : 계약심사과 회의실 및 밤섬 사업부지

□ 심사 내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 여부 검토 등

3		심사 결과

① 성능향상 : 아이디어 31건을 제안하여 24건 채택【채택률 77.4%】

② 비용절감 : 공사비 11,738백만원에서 268백만원 감액【절감률 2.28%】

□ 설계VE 검토결과

- 유형별 제안건수 및 절감액

(단위: 건, 백만원)

	시공성 향상	건 수	3
		절감액	229.6
	유지관리향상	건 수	4
		절감액	40.21
	안전성 강화	건 수	1
		절감액	-1.7
	설계 보완	건 수	16
		절감액	-

- 비용절감 및 가치향상

(단위: 점, 백만원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
11,738	268.1	2.28%	100	101.5	1.5%	100	103.1	3.1%

- 주요 대안내용

1)【시공성 향상】 ○ 말뚝 길이 및 두께를 조정 ․ 절감액 : 46백만원 - 말뚝 근입 연암 및 두께12mm→9mm ⇒ 경제성 및 시공성 증대	↓

2)【안전성 강화】 ○ 수상택시 접안부에 벽부형 투광기를 설치 ․ 절감액 : -1.7백만원 - 안전을 위한 조명시설(투광기)를 벽체에 부착 ⇒ 안전사고예방	없음 ↓

3)【시공성 향상】 ○ 앵커블록 여유폭1,500을1,000으로 조정 ․ 감액 : 181.3백만원 - 앵커블록 여유폭 조정 ⇒ 여유폭 조정, 공사비 감소	↓

4		행정사항

□ 설계경제성 심사 결과 통보 : 한강사업본부 한강관광사업과

붙임 1. 설계 경제성 심사 제안 채택목록 1부.

2. 설계 경제성 심사 결과 보고서(별도) 1부.

3. 설계 경제성 심사 참여자 목록 1부.  끝.