투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	(주)세안텍스
(경유)
제목	2020년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가) 작업지시 기간 연장 승인

1.『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』의 작업지시 기간 연장 요청사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 안전사고가 발생되지 않도록 작업 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시 기간 연장 현황

작업지시 번호	작업기간		연장사유	비고
	당초	변경
4차 연번 4 (중앙버스정류장 보도블럭 정비)	*****************************	*****************************	보도블럭 내 맨홀관리기관과 협의 지연

끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	황태선		도로보수과장	10/14 이화신
협조자
시행	도로보수과-9210	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 도로보수과 (번동)	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/		/	부분공개(5)