문서번호	급수운영과-16942
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
김초민	代김승진	이병운		10/14 이종주
협 조

설계변경 검토보고

공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사

2020. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고

(공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사)

「공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사」 업무수행 중 현장 여건 변화에 따라 물량 증․감이 발생되어 설계변경을 실시하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 공덕동주민센터외 18개소 아리수 음수대 배관설치공사

○ 계약기간 : 2020. 8. 13. ~ 2020. 12. 21.

○ 계 약 자 : ***************

○ 공사개요

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	D=13~25㎜, L=223m	D=13~25㎜, L=315m	증92m
계약금액	************	************	***********

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○  현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 「스텐레스배관공(13mm)외 28개 공종」 물량 변동

- 제비율 항목 중 건강보험료 등 사후정산 항목 감액

○  서울여자고등학교 아리수 음수대 전용 직결급수배관 추가설치

- 공사개요 : D = 13mm, L=110m 추가부설(붙임1)

○  음수대 설치 취소 및 자체배관공사 실시

- 신수중학교, 서부공원녹지사업소, 인왕중학교

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	**********	**********	*********
부가가치세	*********	*********	*******
도 급 비	**********	**********	*********

○ 주요 물량 증 ․ 감

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
가교발포폴리에틸렌보온	D15×25T	m	129	221	561,200
코아드릴(벽채)	D15~25 CON(두께150mm기준)	개소	2	10	255,856
스텐레스배관공	13mm	m	130	222	184,920
밸브 및 콕류설치	D15~25	개소	38	58	169,200
PVC배수배관공	30mm	m	86	79	-98,630
SSP직관	13mm	m	137	234	138,710
소켓(삽입식 스텐렌스이음쇠)	13mm	개	47	112	321,000
발브소켓(삽입식 스텐렌스이음쇠)	13mm	개	34	58	316,800
볼밸브(삽입식 스텐렌스이음쇠)	13mm	개	32	58	312,780

○ 제비율 감액 (사후정산 항목)

제비율 항목	금 액		증 감
	당초	변경
건강보험료	*******	*	********
노인장기요양보험료	*******	*	*******
연금보험료	********	*	********

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 「설계변경 심의위원회」를 개최하여 심의 결과에 따라 설계변경계약 공사 추진에 만전을 기하고자 함

붙 임  1. 아리수 음수대 배관 설치공사 보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경 심의설명서 1부.  끝.