문서번호	계약심사과-17740
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
박홍		노형근	10/15 김수정
협 조
	건축심사팀장			서홍일
	설비심사팀장			代방진표

1호선 동대문역 리모델링공사 실시설계 설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

2019. 10.

재  무  국

(계약심사과)

1호선 동대문역 리모델링공사 실시설계

설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

서울교통공사(건축1사업소) 시행「1호선 동대문역 리모델링공사 실시설계」에 대해 설계VE전담팀을 구성하고, 설계VE·계약심사 통합심사를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 설계 경제성 심사 요청(건축1사업소-7008. ‘19. 10. 10.)

2		심사 요청 개요

□ 신청부서 : 서울교통공사 건축1사업소

□ 사 업  명 : 1호선 동대문역 리모델링공사 실시설계

□ 위    치 : 종로구 종로 302(지하철 1호선 동대문역)

□ 사업내용 : 대합실, 승강장 및 잉여공간의 노후 시설물 리모델링

- 시설면적 : 4,460㎡, 지하2층(대합실 1개층, 승강장 1개층)

□ 공 사 비 : 5,900백만원

□ 용역기간 : ’19.4.1. ~ ’19.11.27.

□ 설계공정률 : 80%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 추진 방법 : VE전담팀을 구성하여 설계VE·계약심사 통합심사

○ VE심사팀, 발주·설계·유지관리부서 직원 등 25명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸노형근 토목심사2팀장 계약심사과 ▸박홍 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸이인재 위원 한국건설VE연구원	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸남기윤 요원 ㈜리오씨엠건축
외부 검토위원 (5개 분야)	▸(건축계획) 빈혜진 위원 다옴스페이스 ▸(건축시공) 오치현 위원 ㈜이스트씨에이 ▸(전 기) 이종혁 위원 동일기술공사 ▸(정보통신) 권규철 위원 테크뱅크 ▸(기 계) 흥승수 위원 성일이앤씨	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
내부 검토위원 (3명)	▸(건축) 배재식 주무관 계약심사과 ▸(전기) 황문연 주무관 계약심사과 ▸(기계) 김경일 주무관 계약심사과	․ 설계도서 형식 검토 ․ 계약심사
발주부서	▸김종경 과장 서울교통공사 건축1사업소	․ 사업설명, 제안서 검토
유지관리부서	▸우명근 부장 서울교통공사 건축1사업소	․ 유지관리 시 특이사항 설명
설계자(11명)	▸정재학 소장 ㈜산성건축사사무소 ▸분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’19. 11. 18.(월) 10:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실 및 현장
’19. 11. 20.(수) 10:00~17:00	- 검토회의 : 기능정리, 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 11. 27.(수) 14:00~17:00	- 최종검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완 통보 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 12. 12.(목)	- 설계도서 수정본 제출 (서울교통공사 ⇒ 계약심사과)
’19. 12. 24.(화)	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 서울교통공사)

□ 설계VE·계약심사 통합심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19. 10. 10.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19. 10. 15.		설계VE․계약심사 통합심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 계 약 심 사 통 합 심 사 운 영		’19. 11. 18. ~ ’19. 11. 27. (1일차~10일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’19. 11. 28. (11일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ VE 제안서 통보
		’19. 12. 12. (25일차)		설계도서 수정 및 제출 (발주부서 → 계약심사과)		▸ 설계도서 수정 및 제출
		’19. 12. 12. ~ ’19. 12. 23. (36일차)		계약심사 (계약심사과)		▸ 분야별 계약심사 ▸ 설계VE 결과보고서 작성
		’19. 12. 24. (37일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요 예산

□ 총금액 : 9,507천원

○ 외부위원 수당 : 9,007천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,472천원(2,472천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 5,695천원(1,139천원 × 5명)

- 진행보조요원(중급기술자)    : 840천원(840천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(서울교통공사 건축1사업소)

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후 계획

□ 통합심사 결과 통보 : ’19. 12. 24.(예정)

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.