“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰[조경관리용역(제2회)]

1. 우리센터에서 시행중인 『뚝도아리수정수센터 조경관리용역』건에 대하여 아래와 같이      설계변경 및 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 2020년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역

나. 용역개요 :  잔디깍기 68,130㎡,  풀깍기 73,840㎡ 등

다. 용역기간 : 2020. 03. 19. ~ 2020. 12. 21.

라. 도 급 자 : 장우조경(주)  대표 박우황

마. 설계변경(제2회)                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비	111,789,600	111,789,600	-
도 급 비	101,789,600	101,789,600	-
관 급 비	10,000,000	10,000,000	-

바. 설계변경 사유 : 공종 간 계약 물량 조정

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부

2. 설계변경 사유서 및 변경 내역서 각 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김영후		정수시설과장	代서광호		뚝도아리수정수센터소장	10/08 김중영
협조자	주무관	장현순		주무관	김효영
시행	정수시설과-7007	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)3146-5577	/전송	02)3146-5508	/	kyhoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)