“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	행정사무감사 요구자료 제출(30억원 이상 공사계약 설계변경 내역)

1. 재무과-49623호(2020.10.6.)와 관련입니다.

2. 2020년 행정사무감사 관련 요구자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 요구내용

- 요구자료 : 민선7기 서울시 발주공사(30억원 이상) 설계변경 내역 및 변경사유, 이에 따른 예산 증.감 내역(2018.7.1.~2020.9.30.)

나. 제출자료 요약

(단위 : 백만원)

연번	발주부서	계 약 명	최초계약 일자	변경계약 일자	최초계약 금액	변경계약 금액	증감액
합계					35,331	41,524	6,211
1	강서수도 사업소	2018년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사	2018- 05-15	2019- 06-10	3,050	4,413	1,363
2	중부수도 사업소	2018년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사	2018- 06-14	2019- 07-15	4,053	4,051	-2
3	남부수도 사업소	2018년 남부 관내 상수도 긴급누수복구공사	2018- 06-20	2019- 07-19	3,662	4,713	1,051
4	상수도 사업본부	국사봉 배수지 건설공사	2016- 11-18	2019- 10-30	8,873	10,194	1,321
5	상수도 사업본부	암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사	2018- 07-20	2020- 04-20	3,235	2,757	-478
6	중부수도 사업소	2019년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사	2019- 06-04	2020- 05-27	4,205	4,618	413
7	남부수도 사업소	2019년 남부수도사업소 관내 상수도 긴급누수복구공사	2019- 06-28	2020- 06-30	3,598	4,689	1,091
8	상수도 사업본부	우면산 가압장 급수체계 개선공사	2017- 12-12	2020- 08-24	4,655	6,107	1,452

붙임  30억원 이상 공사계약 설계변경 내역(상수도사업본부) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박상진		재무회계과장	김분숙		요금관리부장	10/08 장화영
협조자
시행	재무회계과-13641	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 (합동)	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/	chadol2000@seoul.go.kr	/	대시민공개