문서번호	도로보수과-10179
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	10/12 김영철
협 조
	주무관			이상하

’20/’21 제설작업 용역(장기계속) 발주계획 보고

2020. 10.

서부도로사업소

(도로보수과)

’20/’21 제설작업 용역(장기계속) 발주계획 보고

‘20/’21 제설대책 추진과 관련하여 강설초기 신속한 제설작업에 만전을 기하고자 제설작업(장기계속) 용역 발주계획을 검토하고 결과를 보고함.

□ 추진근거

○ ‘20년 한시적 계약심사 제외대상 지정 알림[계약심사과-22295(’19.12.23.)호]

○ ‘20년 제설대책 추진 예산 재배정[도로관리과-831(‘20.01.14.)호]

○ ’20/‘21년 제설대책 민간용역 추진계획[도로관리과-15475(‘19.10.08.)호]

□ 발주개요

○ 발주방법 : 별도 발주(장기계속계약)

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가 자격 : 건설기계관리법 제21조 규정에 의한 일반건설기계 대여업(4901) 또는 개별건설기계대여업(4902) 신고를 필하고 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 용역발주 개요

- 용 역 명 : ‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)

- 용역기간 : ‘20.11.01.~’21.03.31.(제설준비기간 포함)

- 소요예산 : 340,500천원

계	1차분(‘19.11.01~12.31)	2차분(‘20.01.01~03.31)
340,500천원	150,600천원	189,900천원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비

- 계약심사 : 한시적 계약심사 제외대상(2019.12.23.)

- 주요공정 및 물량(전체분)

구분	공 종	규격	수량	단위	비고
제설인력	상황반장	주간	76	hr
	상황반장	야간	54	hr
	상황대기원	야간	122	일
	제설작업원	주간	139	hr
	제설작업원	야간	109	hr
	제설작업원 (15톤덤프, 백호)	주간	304	hr
	제설작업원 (15톤덤프, 백호)	야간	188	hr
제설장비	제설장비 (상시대기)	굴삭기(0.6㎡)	131	hr
	제설작업	굴삭기(0.6㎡)	22	hr
	덤프트럭(월임대) 유류비		144	hr
	제설상황실	3m*9m (콘테이너)	1	동
	덤프트럭 월임대	15톤 덤프 (유류비 제외)	4	월

- 작년 대비 변경사항 : 백호 대가 산출방법 변경(市-도로관리과-15475호)

‣ 대기 시간 : 상황발령 시간 적용

‣ 작업 시간 : 실제 작업시간 적용

○ 추진일정

- ‘20.10.13. : 사전규격 공개

- ‘20.10.19. : 용역발주 및 계약의뢰(서울시 재무과)

- ‘20.10.20. : 입찰공고

붙임 1. 2020년도 제설대책 추진 예산 재배정 1부.

2. 한시적 계약심사 제외대상 지정 알림1부.

3. ’20/‘21년 제설대책 민간용역 추진계획 1부.

4. 제설작업 용역(장기계속) 설계내역서 2부.  끝.