문서번호	공공재생과-10205
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
윤부석		신명승	10/13 이동일
협조
	★주무관		김지호

새말교 하부 그린스페이스 조성 설계 용역

준공기한 연장 검토 보고

2020. 10.

도시재생실

(공공재생과)

새말교 하부 그린스페이스 조성 설계 용역 시행 계획

준공기한 연장 검토 보고

‘새말교 하부 그린스페이스 조성 설계 용역’의 추가 과업기간 확보가 필요하여 내실있는 용역 수행을 위해 준공기한을 연장하고자 함

Ⅰ		개 요

■ 사업 개요

□ 용 역 명 : 새말교 하부 그린스페이스 조성 설계용역

□ 용역기간 : ‘20. 4. 29 ~ ‘20. 10. 25

□ 용역금액 : 금52,145,500원(금오천이백일십사만오천오백원)

□ 계약업체 : 건축사 사무소 이와임(대표 : 이도은)

□ 대 상 지 : 용산구 후암동 343-4번지 새말교 상하부공간

□ 규    모 : 새말교(L=38m, B=10m)상부 보행데크 및 하부공간 일대

□ 주요 과업내용

- 광장 및 쉼터조성을 통한 노후공간 환경개선

- 보행데크 설치 및 계단 경사도 조정 등을 통한 주민보행환경 개선

Ⅱ		추진 경위

□ ‘20. 3.20. : 용역 추진방침

□ ‘20. 4.29. : 용역 계약 및 착수

□ ‘20. 5.12. : 용역 착수보고

□ ‘20. 8.21. : 제1차 주민설명회(주민의견수렴)

□ ‘20. 9.25. : 용역 중간보고

Ⅲ		검토 내용

■ 준공기한 연장 검토 내용

□ 준공기한 연장

- 당 초 : 2020.4.29. ~ 2020.10.25.

- **************************************

□ 연장 사유

- ************************************************************

- ************************************

■ 검토 결과

□ 처리 의견

- ************************************* *************

- 용역의 내실있는 추진과 과업결과물의 완성도 제고를 위해 준공기한 연장이 타당하다 사료됨

□ 용역기간 변경

당 초	변 경	비고
2020.4.29.~2020.10.25.	*********************	************* ********

□ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(공공재생과)

□ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.