문서번호	공원시설과-4099
결재일자	2020. 10. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
현병철		최연호	10/15 김인숙
협조

- 광나루한강공원 어린이야구장 조명설치 공사 -

시굴조사 및 학술자문회의결과 조치계획

2020.  10.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 어린이야구장 조명설치 공사 -

시굴조사 및 학술자문회의결과 조치계획

「광나루 어린이야구장 조명설치 공사」추진 중 시굴조사 후 학술자문회의 결과 조치계획에 대한 보고임.

□ 공사개요

○ 위    치 : 광나루 한강공원 내 어린이야구장 (송파구 풍납동 49-2)

○ 규    모 : 야구장 조명탑 4본, 투광등 20개, 전선관 매립 577m

○ 공사기간 : ’20. 6.25. ~ 10.31.

○ 총공사비 : 115,966천원 (도급비 60,456, 관급비 49,867, 설계비 5,643)

○ 시공업체 : 센트로건설(주)

천호대교

□ 시굴조사 결과

○ 금번 사적범위 내 공사 부지내에 대하여 유구흔적 및 문화층 미발견

- 시굴조사 구간인 4개 구역 전체에서 1~2m 이상의 복토층이 확인되었으며, 복토층 아래로는 한강유수와 관련된 사층과 사력층이 확인 됨

□ 학술자문회의 결과

○ 회 의 명 : 광나루 어린이야구장 내 조명설치 부지 내 시굴조사

○ 일    시 : 2020.10.12.(월) 09:30~10:30

○ 장    소 : 광나루 어린이야구장 조명설치 부지 조사 현장

○ 내    용

- 시굴조사 현황 보고

- 조사내용에 대한 학술 자문

- 풍납토성 한강변 사적지 현상변경 행위 검토 및 보존 방안 자문

○ 자문위원 : **************

○ 자문결과

- 금번 조사지역은 풍납토성과 관련된 인공적인 문화층은 미확인됨

- 그러나 사적지정구역 남쪽인 사업예정구역이 풍납토성의 서성벽 진행방향으로 추정되는 구간과 중복됨으로 추가적인 시굴조사 필요

□ 조치계획

○ 추가 시굴조사 실시 (한성백제박물관)

- 조사기간 : ’20.10.19. ~ 30.

- 조사구간 : 한강변 사적지 내 전기매설 구간 약 400m

· 약 90m(기존) → 약 400m(추가)

- 조사면적 : 120m2

· 360m2(기존) → 120m2(추가)

- 소요비용 : 금4,670,000원

○ 준공기한 연기 조치

- 추가 시굴조사 시행으로 인한 공사기간 연기

- 준공기한 연기 : ’20.10.31. → ’20.12.31.

○ 자문회의 수당 지급 : 150천원

- 회의수당 : 1인 × 150,000원

********************************************

- 비용처리 : 협약서 체결에 따른 사업시행자(한강사업본부) 부담

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 직영 체육시설 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ ’20.10.19. ~ 30. : 시굴조사 변경 착수신고 및 조사착수

○ ’20.11.2. ~ 12.31. : 시굴조사 결과 문화재 미발견시 공사 재시행

붙임 1. 광나루 어린이야구장 조명설치 부지 내 유적 학술자문회의 결과보고 1부.

2. 자문의견서 1부.  끝.