투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	가락지하차도 보수공사 용 자재수급 변경통보

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에 감독 위탁한『가락지하차도 보수공사』의 공정 중 지하차도 배수로 설치 공정의 자재를 다음과 같이 변경코자 하니, 추후 공사 (신규)물량변경에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대상공종 : 계약내역「2.10 측구수로 설치공」

나. 변경내용 : 당초 지하차도 측구수로 설치공의 자재(******************)를 조달구매하여 시공사 지급·설치계획이었으나, 조달구매 불가로 부득이 사급자재로 변경조치

다. 검토사항 : 동일 이상(가격 및 성능 등)의 제품 선정 후 시공사와 물량변경계약 시행

붙임  당초계획 자재현황 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	오상호		시설보수과장	10/15 임영철
협조자
시행	시설보수과-8268	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0372	/전송	02-2040-0308	/	foc8850@seoul.go.kr	/	부분공개(5)