문서번호	녹지관리과-5012
결재일자	2020. 10. 16.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
이규하		곽영만	10/16 김인숙
협조

- 2020년 반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사 - 현장여건에 따른 설계변경 검토보고

공   원   부

(녹지관리과)

- 반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사 -

현장 여건에 따른 설계변경 검토보고

「반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사」와 관련하여 시공 중

현장 여건에 따른 설계변경사항을 아래와 같이 검토보고 합니다.

Ⅰ		공사 개요

공 사 명: 반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사

공사기간: 2020. 9. 25.~10. 22.

공사내용: 수목정비, 잔디식재, 시설물(우,배수시설 등) 설치

도 급 비: ****************

도 급 자: **************)

Ⅱ		설계변경 내역

세부 변경 내역

구분	현황 및 문제점	검토결과	비고
기 반 정 비 ∩ 토 사 제 거 ∪	▶ 서래섬의 낚시터에 쌓여있는 진흙 제거가 당초에는 4.0m 폭으로 예상하였으나, 한강홍수위가 정상화 된 후 실측결과 8.0m 폭으로 늘었음(2,706.0m2 증) - 평균폭 8.0m를 제거해야 낚시터로 이용 가능 ▶ 제1피크닉장과 한강수변 사이에 토사가 다량 쌓여 있어, 피크닉장 이용시 한강수면을 바라볼 수 없음에 대한 민원이 제거됨 현장민원(20200816805146. 익명) - 시야를 가리는 토사를 제거하고 잔디 식재	▶ 토사제거(서래섬) 2,710.0m2 → 5,416.0m2 ▶ 토사제거(한강변 데크부분) 0.0m2 → 671.0m2

구분	현황 및 문제점	검토결과	비고
식재공사	▶ 서래섬 잔디식재 구역 조정(1,047.0m2 증) 및 제1피크닉장 주변부 토사제거에 따른 식생기반(1,824.0m2 증) 면적 증가 (총 2,871.0m2 증) ▶ 서래섬 사면 잔디수로 설치 및 현장여건 반영에 따른 식재면고르기 면적 감소(1,047.0m2 감) ▶ 제1피크닉장 주변부 토사제거에 따른 잔디식재 면적 증가(1,824.0m2 증) ▶ 잔디식재는 「건설공사 표준품셈 제4장 조경공사 4-1-1 잔디붙임」 ㈜③회 식재시 1회 물주기는 포함는 포함되어 있으나, 장기간 비가 오지 않아 잔디의 생육을 위하여 준공전 잔디 관수 1회를 추가 실시 반영	▶ 식생기반 52,025.0m2 → 54,896.0m2 ▶ 식재면고르기 3,773.0m2 → 2,726.0m2 ▶ 잔디붙임 55,798.0m2 → 57,622.0m2 ▶ 잔디관수 0.0m2 → 57,622.0m2
시설물공사	▶ 피크닉장(1, 2) 집수정 우수관 추가 설치에 따른 아스팔트포장 철거, 포장면 절단(43.0M 증) 및 아스팔트포장 면적 증가(21.6m2 증) ▶ 녹지부분 보도블럭포장은 시설물 관리부서(시설관리과)에서 수행하여 사업대상에서 제외 ▶ 앉음벽 보수는 현장 여건을 반영하여 물량증가(2.6M 증) ▶ 제1피크닉장 주변 녹지의 급경사지역 완화를 위해서, 현장발생석을 활용한 조경석 쌓기 추가 ▶ 피크닉장 및 서래섬에 설치된 벤치가 이용에 불편하게 설치되어 이용객 편의를 위하여 위치 변경설치 ▶ 피크닉장 잔디식재에 따른 이용객 출입제한을 위한 가설휀스 설치 ▶ 서래섬 산책로 주변 식생복원 및 잔디수로 설치에 따른 마사토포장 면적 감소(1,942.0m2 감)	▶ 아스팔트포장 37.4m2 → 59.0m2 ▶ 포장면절단 168.0M → 211.5M ▶ 보도블럭포장 500.0m2 → 0m2 ▶ 앉음벽 10.0M → 12.6M ▶ 조경석쌓기 0.0M → 19.0M ▶ 벤치이설 0개소 → 13개소 ▶ 가설휀스 0경간 → 186경간 ▶ 마사토포장 4,017.0m2 → 2,075.00m2

구분	현황 및 문제점	검토결과	비고
시설물공사	▶ 피크닉장 배수불량 구간 발생에 따른 집수정(6개소 증) 및 우수관A(ф300) 추가(228.0M 증) ▶ 서래섬 산책로의 경우 배수처리시설이 없어 우천시 마사토포장 구간 이용이 어려움 - 배수 불량구간 처리를 위한 PE빗물받이, 잔디수로B(서래섬) 및 우수관B(ф150) 추가(108.0M 증) 반영 ▶ 피크닉장 및 일부 녹지대의 수목들 주변 배수처리가 불량하여 우천시 물고임 현상 발생 - 배수 불량구간 처리를 위한 잔디수로A(피크닉장) 설치에 따른 토공량 변경	▶ 집수정 27개소 → 33개소 ▶ 우수관A 801.5M → 1,029.5M ▶ PE빗물받이 0개소 → 49개소 ▶ 우수관B 62.0M → 170.0M ▶ 잔디수로B 0.0M → 1,354.0M ▶ 잔디수로A 0.0M → 2,567.0M
페기물처리	▶ 보도블럭포장 물량 삭제에 따른 건설폐기물 운반비(12.3M3 감) 및 처리비(25.3ton 감) 감소 ▶ 식생기반 조성시 고사목 뿌리 및 쓰레기 발생에 따른 혼합폐기물 운반비(27.468M3 증) 및 처리비(21.974ton 증) 증가	▶ 건설폐기물 운반비 22.525m3 → 10.225m2 ▶ 건설폐기물 처리비 48.788ton → 23.488ton ▶ 혼합폐기물 운반비 59.533m3 → 87.001m2 ▶ 혼합폐기물 처리비 47.413ton → 69.387ton
관급자재	▶ 서래섬의 잔디광장 및 피크닉장 파고라 하부의 경우, 이용객이 많아 잔디생육을 위한 출입제한시 민원 발생이 예상되므로 기존과 같이 잔디보호 매트를 설치하여 답압에 의한 잔디고사를 에방하고자 함. -> 잔디보호를 위한 보호매트 설치	▶ 잔디보호매트 0.0m2 → 2,000.0m2

예산변경 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
****		*************	*************	************
* * *	****	*************	*************	***********
	*****	***********	***********	**********
	*	*************	*************	***********
***		*	**********	***********

- 예산과목: 한강사업본부 녹지관리과, 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 응급복구(재난관리기금 재난계정) 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		보고자 검토의견

위에 같이 현장여건에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항으로 설계변경을 시행하여 반포한강공원을 찾는 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원에서 휴식을 할 수 있도록 조성하고자 함.

붙임   1. 설계변경내역서 1부

2. 현황사진 1부

3. 수량 산출서 1부. 끝.