문서번호	토목부-19975
결재일자	2020. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	10/16 김용제
협조

보행육교 철거에 따른 임시계단 설치 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

도시기반시설본부

토 목 부

보행육교 철거에 따른 임시계단 설치 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

개봉고가의 경인선 철도를 횡단하는 보행육교 철거 및 재설치 공사 기간 중에 철도 횡단 보행 불편을 개선하기 위해 임시 가설 계단을 설치하고자 검토 보고 드림.

1		관련근거

❍ 건설기술진흥법 제63조(안전관리비용)

❍ 교량안전과-15003(’19. 8. 30.) 우회보행로 검토 회신

❍ 구로구 도로과-4562(’20. 3. 20.) 임시가설계단 설치 검토의견

2		공사개요

❍ 위    치 : 개봉고가차도(구로구 개봉로 68~개봉로 124)

❍ 규    모 : 교량성능개선(DB18→24), 폭 18.9m, 연장 332m

❍ 총사업비 : 22,662백만 원(도급비 12,697백만 원)

❍ 사업기간 : ’19. 8. 12. ~ ’23. 4. 11.

❍ 감리단/시공사 : ㈜유신 외 2개사 / 홍익산업개발㈜ 외 1개사

3		보고내용

❍ 개봉고가 하행선(광명시 방면) 구간에 설치되어 있는 경인선 철도를 횡단하는 노후된 보행육교는 철거 후 재 설치하도록 설계됨.

❍ 주민들이 이용하는 보행육교는 공사 기간 중에 보행이 단절되어 이에 대한 방안으로 우회 보행 노선을 계획했지만 보행노선의 거리가 크게 증가되어 우회 보행로 개선 대책이 필요함.

❍ 보행 우회 노선 계획도(설계)

❍ 보행육교 철거에 따른 우회 보행로를 개선하고자 개봉고가 상행선(개봉사거리 방면) 보도부에 임시 가설 계단 2개소를 설치하여 경인선 철도 횡단 보행로 단절에 대한 불편을 최소화하고자 함.

- 건설기술진흥법 시행규칙 제60조제2항제4호에 따른 공사시행 중의 통행안전을 위한 시설의 설치비용(안전관리비) 반영

❍ 임시 가설 계단 설치 계획도

❍ 수량 변경 현황

공 종	규격	단위	당초	변경	증‧감	비고
보도블록 철거, 복구	T=6~8mm	M2	-	66	66
구조물터파기	육상토사(0~1m)	M3	-	75	75
콘크리트타설	25-24-150	M3	-	24	24
철골가공조립	H형강	ton	-	29.381	29.381
데크 설치	멀바우	M2	-	111	111
난간	H=1.2m	M	-	134	134
캐노피	육교 계단	식	-	1	1
미끄럼방지 시설	논슬립	m	-	163	163
자전거경사로	200×73×1,000	m	-	35	35
포장복구	아스콘	M2	-	73	73
고재처리		ton	-	29.44	29.44
철도운행안전관리자	초급기술자	인	-	44	44
실시설계비		식	-	1	1

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	-	227,101	227,101
제경비	-	170,229	170,229
설계비	-	24,400	24,400
공급가액	-	421,730	421,730
V.A.T	-	42,173	42,173
도급비	-	463,903	463,903

4		조치의견

❍ 개봉고가 보행육교 철거 및 재설치 공사 기간 중에 경인선 철도 횡단 보행 불편 최소화를 위한 임시 가설 계단 설치에 대한 책임건설사업관리기술인의 실정보고는 적정하므로 승인 처리하고 추후 설계변경에 정산 반영하고자 함.

❍ 단가적용

- 신규단가에 대해 계약상대자와 성실히 협의를 하였으나 이견이 있어 강제협의율[(낙찰률 82.231%+100%)×1/2] 적용

붙임  건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.