문서번호	정수시설과-9373
결재일자	2020. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김우빈		10/16 이천영
협조

2020년 토목건축시설물 유지보수공사

설계변경 심의결과 보고

2020. 10.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 토목건축시설물 유지보수공사

설계변경 심의결과 보고

우리 정수센터에서 시행 중인『2020년 토목건축시설물 유지보수공사』설계변경 자체 심의위원회를 개최하고 결과를 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 토목건축시설물 유지보수공사

○ 공사내용 : 광암정수센터 내 토목, 건축 시설물 유지보수

○ 공사기간 : 2020. 3. 16. ~ 2021. 03. 31.

○ 도 급 비 : *********

○ 도 급 자 : ************

□ 심의위원회 개요

○ 일    시 : 2020.10.15.(목) 15:00

○ 구    성

- 위원장(1) : 정수시설과장

- 위  원(4) : 토목6급 박종민, 전기6급 지동성, 기계6급 송재홍, 전기6급 이민화

○ 안    건

- 현장여건 반영 및 공종별 물량변경에 따른 설계변경 적정성

- 제경비(보험료) 정산 및 제비율 요율 산정의 적정성 등

□ 설계변경 심의내용

○ 현장여건에 따른 공사내용 적정성 여부

○ 공종별 물량변경 및 신규공종 추가에 따른 설계변경의 적정성 여부

○ 제경비 정산 및 제비율 요율 산정의 적정성 여부 등

○ 공사비 변경사항

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		***********	***********	************
1차 계약금액		***********	***********	************
2차 계약금액		**********	**********	***********
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

예산과목 : 상수도사업비용, 정수비, 수선유지교체비, 토목건축시설물유지관리

□ 심의결과 : 적정함

○ 현장여건에 따른 공종별 물량변경 및 제경비 정산 등에 따른 설계변경이 적정하게 반영되었음.

□ 조치계획

○ 설계변경 심의결과 적정하므로 이에 따라 설계변경 시행코자 함.

붙    임  1. 설계변경 심의 결과서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.