“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의위원회 개최(월계동 12번지 외 2개소 장기사용 배급수관 정비공사)

1. 우리 사업소에서 시행하고 서울시설공단에서 감독중인 『월계동 12번지 외 2개소 장기사용 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 월계동 12번지 외 2개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2020. 4. 10. ~ 2020. 10. 21.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : *********************

마. 도 급 자 : **************

바. 감 독 자 : **********

사. 설계변경 사유  - 신규공종 발생에 따른 변경
- 기타 현장여건에 따른 물량변경

아. 도급비 변경

(단위 : 원)

구 분	금 액		증,감
	당 초	변 경
도 급 액	***********	***********	************

자. 심의회 개최

- 심의일정 : 2020. 10. 16.(금) 13:30

- 장    소 : 급수운영과

- 심의위원 : **********

- 위    원 : ******************

******************

- 심의내용 : 신규공종, 계약물량 증감에 따른 설계변경 적정 여부

기타 제반규정 적정준수여부

붙 임 : 1) 설계변경 심의요구서 및 사유서 각 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 제비율 검증확인서 1부.  끝.

주무관	조은성		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	10/16 유승효
협조자
시행	급수운영과-19490	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3345	/전송	02-3146-3389	/	asdfgg1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)