문서번호	녹지관리과-5082
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
임혜리		곽영만	10/19 代이정환
협조

「노들섬 풍수해(침수) 복구공사」 설계변경 검토보고

공 원 부

(녹지관리과)

「노들섬 풍수해(침수) 복구계획」

설계변경 검토보고

노들섬 풍수해(침수) 복구공사에 대해 현장확인 및 도급사 실정보고에 따라 변경사항을 검토하고 그 내용을 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 노들섬 풍수해(침수) 복구공사

○ 위    치: 노들섬 하단부 녹지대 및 크랙가든

○ 공사기간: 2020. 9. 29. ~ 10. 23.

○ 공사내용: 수목바로세우기, 뻘제거 등

○ 도 급 비: 금156,816,000원(금일억오천육백팔십일만육천원)

○ 도 급 자: 마방건설주식회사 대표 손신자

□ 설계변경 내용0

○ 현황 및 검토내용

구 분	현황 및 문제점	검토내용	비고
시설공	▶ 당초 경사지의 녹지대에 집수정이 설치 되지 않아 토사 유출로 인한 잔디 및 식물들이 피해를 입었기에 잔디수로에 빗물받이를 보완하여 추후 우기시 재침수 피해를 줄이고, 보행로의 토사 유출 및 잔디훼손 방지 필요	▶ 빗물받이 보완 반영 - 자연석철거 후 재쌓기 0개소→5개소 - PE빗물받이 설치 0개소→5개소 - PE이중벽관 설치 0m→7.5m

○ 현장사진

□ 설계변경 금액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	142,560,000	143,860,000	1,300,000
	부가세	14,253,000	14,386,000	130,000
	도급비계	156,816,000	158,246,000	1,430,000
총 공 사 비		156,816,000	158,246,000	1,430,000

○ 예산과목: 한강사업본부 녹지관리과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구,                 응급복구(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비

□ 보고자 의견

○ 현장에 따른 설계변경을 반영하여 공기내 복구공사를 마무리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증내역서 1부.  끝.